“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(1차) 계약의뢰(2020년-1 정릉동등 10개동 상수도공사)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 『2020년-1 정릉동등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여

아래와 같이 설계변경(1차) 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2020년-1 정릉동등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 :*******************

다. 계약기간 : 당초 2021.03.09. ~ 2021.06.30. / 변경 2021.03.09. ~ 2021.08.05.

라. 설계변경 내용 : 물량 증․감 및 공사기간 연장

마. 설계변경 내역                                                          (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
도급비	***********	***********	-

바. 계약금액 변경사유 : 시공물량 증․감 및 공사기간 연장 등으로 변경계약 요인 발생

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급.배수공사비, 신설공사비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

아. 최대이행금액 : *********

붙  임 : 1. 설계변경 관련 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 및 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	이승환		시설안전팀장	유세종		시설관리과장	06/24 김상웅
협조자
시행	시설관리과-14875	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2205	/전송	3146-2239	/	leesh79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)