코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 일시 중단 알림

1. 역사문화재과-11760호(2021.6.22.)와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진 중인 「풍납동토성박물관 조성 도시계획시설결정 용역」에 대하여 다음과 같이 과업 수행을 일시 중단하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 풍납동토성박물관 조성 도시계획시설결정 용역

나. 용역비 : *****************************

다. 계약상대자 : ********

라. 계약일자 : 2021. 2. 8.

마. 계약기간 : 2021. 2. 15.~2021. 11. 11.(270일)

바. 과업 중단일자 : 2021. 6. 22.

사. 과업 중단기간 : 2021. 6. 22.~2021. 11. 11.

아. 과업 중단사유 : 대상지 내 기존 건축물의 정밀안전진단 결과에 따라 해당 용역의 과업내용 변경검토가 필요하여 정밀안전진단 완료시까지 과업 중단

붙임  1. 용역 일시 중단 계획 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	역사문화재과장
주무관	이정아		한성백제팀장	오정숙		역사문화재과장	06/24 권순기
협조자
시행	역사문화재과-11846	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 4층	/
전화	02-2133-2624	/전송	02-2133-1062	/		/	부분공개(7)