문서번호	토목부-12325
결재일자	2021. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		최진우	06/28 김용제
협조

거더 보강 관련 기술자문회의 개최

【신림공영차고지(저류조 포함) 조성공사】

2021.06.

도시기반시설본부

(토 목 부)

거더 보강 관련 기술자문회의 개최

본 공사에 구조물에 적용되는 CS-I 거더를 관급자재로 구매하여  제작중 균열이 발생되어 원인 파악 및 거더 안전성 확보를 위하여 아래와 같이 기술자문회의를 개최하고자 합니다.

1	공 사 개 요

○ 공 사 명 : 신림공영차고지(저류조 포함) 조성공사

○ 위    치 : 서울시 관악구 신림동 140-2 일원

○ 규    모 : 주차장(버스 101대), 빗물저류조 1개소(V=35,000㎥)

○ 관급자재 : 154본

○ 관 급 비 : 4,983백만원

○ 계약업체 : 한우믈중공업(주)

○ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링 외 2개사

2	추 진 경 위

○′21.06.03. : 거더 강선 인장 후 단부 콘크리트 균열 발생

○′21.06.04. : 단부 균열 진행 중

○′21.06.08. : 거더 중앙부에서 코아 채취(5개)

- 강도시험결과 평균 37.9MPa(설계강도 50MPa의 75.8%)

○′21.06.23. : 균열발생 원인 대책 회의 개최(도기본, 설계사, 감리사)

3	자문회의 개요

○ 자문안건 : 거더 보강 방안의 적정성

○**********2021. 07. 06.(화) 14:00

○*장    소 : 도시기반시설본부 토목부

○ 자문위원 구성

분야	소 속	직 위	성 명	비 고
****	*********	****	***
****	*****	****	***	************
****	*********************	****	***

4	행정사항

○***********************

○ ***************

- *************************