문서번호	시설관리과-11268
결재일자	2021. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이태화		代조광희	06/28 이태형
협조

『2020년 미아동외 4개동 상수도공사(2차)-최종』

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

2021. 06.

북부수도사업소

〔시설관리과〕

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

『2020년 미아동외 4개동 상수도공사(장기계속단가계약)』시행중 신규공종 및 시공물량 증·감 사항이 발생됨에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의 완료하고 그 결과 보고 드림.

1		일 반 현 황

□ 공 사 명 : 2020년 미아동외 4개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 공사개요

○ 당 초 : D=13~300mm, L=1,270m

○ 변 경 : D=13~300mm, L=771m

(신규공종 및 물량증감 발생 – 설계변경 사유서 참조)

□ 공사기간 : 2020.06.10. ~ 2021.06.30.

□ 도 급 액

○ 당 초 : *************

○ 변 경 : *************

○ 감 액 : ***********

□ 도 급 자 : **************

2		심의회 개최

※ 관련근거 : 서울특별시 계약심사업무 처리규칙 및

2018년 상수도사업 계약심사 추진계획(재무회계과-915,2018.01.22.)

□ 심의일정 : 2021.06.28.(월) 14:00

□ 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

□ 심의위원 : *************

**********************************

3		심 의 내 용

□ 신규공종 및 계약물량 증·감에 따른 설계변경

○ 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

○ 계약변동(증·감) 수량 및 단가 낙착률 적용 적정 여부

○ 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4		설계변경 내역

********************************************************************************************************************************************************************************

□ 신규공종 및 시공물량 증·감에 따른 변경

○ 신규공종 및 물량 증·감 발생

- ************************

○ 공사 중 물량 증·감 사항 발생

- ********************

5		심 의 결 과

□ 설계변경의 타당성 : 타당함

□ 신규공종 발생유무 및 적용 적정성 : 적정함

□ 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

□ 계약변동(증·감) 물량 계약단가 낙착율 적정 적용여부 : 적정함

□ 각종 제반 규정 준수여부 : 준수

□ 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적합

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의결과 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.