투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	제2자유로 건설사업관리단 및 현장대리인
(경유)
제목	지장물 관매달기 실정보고 조건부 승인 알림-제2자유로 종점부 입체화 공사

1. 제2자유입건 제2021-187호(2021. 6.11.)와 관련입니다.

2. 월드컵교차로 지하차도 터파기 공사로 인해 노출되는 하수관로의 관매달기 재료변경 실정보고 건에 대해 재료변경 방안은 적절하다 판단되어 승인하고자 하며, 공사비 산출내역 검토결과 파형강관의 재료비 조사가 일부 미흡하였고 단가산출 시 건설표준품셈을 적용하였으나 표준시장단가를 적용하는 것이 적절하다 판단되므로 조건부 승인하오니 재료변경은 공정계획에 따라 추진하여 주시고 단가산출은 적정단가를 재산출 후 보고하여 주시기 바랍니다.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
★주무관							조동협			토목총괄과장					전결 06/28 진재섭
협조자
시행			토목부-12274									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2543						/전송			02-3708-2599					/	yerom@seoul.go.kr												/	대시민공개