“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행-최종(2020년 등촌1동외 8개동 상수도공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2020년 등촌1동외 8개동 상수도공사(장기계속)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 2020년 등촌1동외 8개동 상수도공사(장기계속)

나. 공사개요: 당초 D=15~300㎜, L=1,195m, 변경 D=15~300㎜, L=898m

다. 공사기간: 2020.04.08 ~ 2021.6.30.

라. 공사업체: 탑건테크(주) 대표 김명자

마. 설계변경 내역                                               (단위 : 원)

구 분	당초	변경	증·감	비고
총 부기금액	***********	***********	************
1차수 금액	***********	***********	*
2차수 금액	***********	***********	************

바. 설계변경 조정 사유: 계약물량 증·감, 신규공종 반영 등

사. 예산과목: 상수도사업비용,영업비용,급배수공사비,신설공사비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비

소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설설치및보수

붙임: 1. 계약금액조정 심사결과 보고 1부.

2. 계약금액조정 결과 통보 문서 1부.

3. 계약금액조정 검토결과서 1부.

4. 설계변경내역서(조정) 1부.

5. 합의서 1부.  끝.

주무관	윤원영		시설안전팀장	이연창		시설관리과장	유명은		강서수도사업소장	06/28 정진일
협조자	주무관	류지호		행정지원과장	추경민
시행	시설관리과-12317	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-3998	/전송		/		/	부분공개(5)