문서번호	도로보수과-5857
결재일자	2021. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
박세근		이화신	06/28 고영준
협 조

5차 작업지시 검토보고

[2021년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6.

북부도로사업소

(도로보수과)

5차 작업지시 검토보고

[2021년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)]

우리사업소에서 시행중인「2021년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)」와 관련 우리사업소 관내 도로 아스팔트포장 손상 등 민원발생 구간의 신속한 정비를 위해 5차 작업지시 검토 보고임

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)-북부

○ 공사개요

- 소규모 포장복구 : 79.8a

- 절삭후 덧씌우기 : 199.3a

○ 총공사비 : 1,962백만원(도: 1,174백만원, 관: 563백만원, 이: 225백만원)

○ 도 급 자 : *********************

▢ 5차 작업지시 개요

○ 작업기간 : 2021. 6. 29. ~ 2021. 8. 31.

○ 작업노선 : 노원로 외 7개 노선

○ 작업계획

공 종	합 계	소규모포장	철거후포장	절삭후덧씌우기	공동복구	비 고
물량(a)	20.19	3.86	0.29	15.32	0.72

○ 예산집행 현황                                                               (단위: 천원)

구 분	계약금액	기 작업완료	금회 작업지시	잔 액	비 고
도급비	1,174,200	1,105,810	95,770	-27,380
관급비	562,841	327,990	18,060	216,791
이전비	225,000	118,440	5,650	100,910
합 계	1,962,041	1,552,240	119,480	290,321

▢ 조치계획

○ 상기 작업계획 물량에 대해 우리사업소와 계약 체결된 「2021년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)」업체에 작업지시하여 안전사고 예방 및 시민 통행불편을 해소하고자 하며,

○ 5차 작업지시 부족 금액(도급비)은 공사 낙찰차액(160백만원)과 예산범위 내에서 반영하여 추후 시공물량 정산 및 설계변경을 시행하고자함.

붙임  1. 작업지시서(5차) 1부.

2. 작업지시 설계서(5차) 1부.

3. 위치도 및 현황사진(5차) 1부.  끝.