코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	물재생계획과장
(경유)
제목	예산조정 요청(중랑물재생센터 3차 (총인)처리시설 설치사업)

1. 물재생시설과-7169(2021.6.25.)호와 관련입니다.

2.중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업과 관련 건설사업관리용역 기간연장 으로 감리비 예산이 부족하여 잔여 시설비를 감리비로 예산조정을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 천원)

구 분							사용 부서	당초 예산액	과목변경요구액		조정후 예산액
세부사업명	예산 구분	관	항	세항	목	세목			증	감
중랑물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치	‘21년 본예산	자본적 지출	비가동설비 자산취득	건설중인자산	시설비 및부대비	시설비	방재시설부	2,442,000		감)70,000	2,372,000
							설비부	100,000	증)10,000		110,000
		자본적 지출	비가동설비 자산취득	건설중인자산	시설비 및부대비	감리비	방재시설부	305,000	증)60,000		365,000

붙임 : 예산조정 방침서 1부.   끝.

	물재생시설과장
주무관	김창수		물재생기획팀장	代양해선		물재생시설과장	06/28 代김태환
협조자
시행	물재생시설과-7193	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 (서소문동)	/
전화	2133-3824	/전송	2133-1043	/	kcsone@seoul.go.kr	/	대시민공개