문서번호	시설과-4385
결재일자	2021. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	관리부장
전성완	안재순	전결 06/29 오성문
협 조
	전략기획실장		代임문자

서울랜드 분기변전소 차양

추가구매 검토 보고

2021. 6.

서울대공원

( 시 설 과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

서울랜드 분기변전소 차양

추가구매 검토 보고

“서울랜드 분기변전소 차양 설치” 사업 시행중 서울랜드측으로부터 차양길이 연장 요청이 있어 이에 대해 검토후 차양 추가구매를 시행하여 분기변전소 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

○ 서울랜드 분기변전소 지붕 설치 관련 요청의 건

(서울랜드 제2021-31호, 2021.06.21.)

○ 서울랜드 분기변전소 차양 설치 계획(시설과-3447, 2021.5.25.)

2		사업개요

○ 사 업 명: 서울랜드 분기변전소 차양 설치

○ 사업기간: 2021. 6. 9 ~ 8. 27

○ 사업내용: 요격편대 등 21개 지구변전소 차양 387㎡ 설치

○ 사 업 비: ********

○ 계 약 자: ************

3		그간 추진사항

○ ‘21. 5. 25.: 서울랜드 분기변전소 차양 설치 계획 수립

○ ‘21. 5. 31.: 특정기술 선정심사위원회 개최 계획 수립

○ ‘21. 6.  7. : 특정기술 선정심사 결과 보고

○ ‘21. 6.  8. : 차양 조달구매 의뢰

○ ‘21. 6.  9. : 계약체결

※ 현 공정률 20%

4		검토내용

○ 현재 물량은 지구변전소 폭, 길이보다 각각 500mm 길게 제작하도록       서로 협의하여 추진중이었으나 우천시 낙수에 의한 부식을 방지하고         점검자의 감전을 방지하는 등 보다 안전한 점검을 위해 500mm보다       길게 차양 제작이 필요하다고 판단됨

○ 다만 서울랜드의 요구에 따라 차양 여유 길이를 1,000mm로 길게        제작할 경우 예산부족 및 현장여건에 따라 수목이 지장되어 설치가        불가능할 수 있음

○ 따라서 현장상황에 맞춰 예산범위내에서 차양을 추가 구매‧설치할         필요가 있음

5		조치계획

○ 계약방법 : 조달구매(3자단가)

○ 구매물량 변경내역

품명	규격	단위	수 량			금액 (증․감)	비고
			당초	변경	증․감
차양	1000×1000	㎡	353	387	34	*******	조달수수료 제외

○ 추가 소요예산 : ********************

○ 예산현황 및 조치계획

(단위 : 원)

세부사업명	예산액 (A)	계약금액 (B)	집행잔액
			계	미집행잔액	낙찰차액 (A-B)
서울랜드 수전용 변압기 교체 및 분기변전소 지붕 교체	***********	***********	*********	*	*********

‣ 차양 추가구매 예산이 부족한바 “서울랜드 주변전소 몰드변압기           (아몰퍼스) 제작․구매(교체) 설치”건에서 발생한 상기 낙찰차액을         일부 활용하여 구매코자 함

○ 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내  이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(서울랜드 수전용 변압기 교체 및 분기변전소 지붕 교체)

붙임  차양 변경내역(변경전‧후) 1부.  끝.