“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(2차,최종) 시행(2020년-1 창신1동 등 10개동 상수도공사)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 『2020년-1 창신1동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 본부 안전조사과의 계약금액조정 결과에 따라 아래와 같이 설계변경(2차,최종)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2020년-1 창신1동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 : 덕부건설(주)  대표 이명학

다. 계약기간 : 2021.1.1. ~ 2021.6.30.(총 공사부기기간 : 2020.12. 1. ~  2021. 6. 30.)

라. 설계변경 내용 : 신공종 발생 및 물량 증․감

마. 설계변경 내역                                                     (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 부기금액	***********	***********	************
2차(금차) 부기금액	***********	***********	************

바. 차수별 계약금액 변경사유 : 시공물량 증․감 및 신공종 발생 등으로 금액의 변동요인 발생

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급.배수공사비, 신설공사비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

붙임 : 1. 설계변경 계약심사 결과 1부.

2. 설계변경 내역서 및 합의서등 1부.  끝.

주무관	이보민		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	김상웅		중부수도사업소장	06/29 김정애
협조자	주무관	신국재
시행	시설관리과-15241	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가) 중부수도사업소	/
전화	02-3146-2194	/전송	02-3146-2239	/	lbm74@seoul.go.kr	/	부분공개(5)