문서번호	시설보수과-2258
결재일자	2021. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설보수과장
박종석		우배용	06/29 조선행
협조

송풍기 설치에 따른 전기공사 정산보고

2021. 6.

난지물재생센터

시설보수과

송풍기 설치에 따른 전기공사 정산보고

센터의 “송풍기 설치에 따른 전기공사” 감독 수행 중 시공물량 증감 및

준공 정산처리를 하고자 아래와 같이 보고드림

1		사업개요

❍ 공 사 명 : 송풍기 설치에 따른 전기공사

❍ 계약업체 : ㈜시울에너지 (대표 민애숙)

❍ 계약금액 : 금33,078,000원(금삼천삼백칠만팔천원)

❍ 공사기간 : 2021. 5. 21. ~ 2021. 7. 5.

❍ 주요공정 : 송풍기 1대 설치에 따른 수배전반 전기공사

2		보고내용(설계변경 및 정산)

❍ 시공물량 변경 사유

- CV케이블 → KIV케이블 변경

: 저압반과 송풍기반간 케이블은 곡률반경이 나오지 않아, 당초 CV케이블로

시공에 어려움이 있어 “책임감리원 의견서”를 검토하여 변경

- 1층에 설치된 저압반 내부와 송풍기반간 누락된 접지선 산입

연번	공 종	당 초	변 경	증 감	비 고
1	TFR-CV 0.6/1KV 300㎟ * 1C	186M	0M	감186M
2	KIV 300㎟ * 1C	0M	120M	증120M
3	GV 50㎟	0M	50M	증50M

❍ 시공물량 증감

❍ 보험료 정산

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계	1,221,527원	0원	감 1,221,527원
건강보험료	503,276원	0원	감 503,276원
노인장기요양보험료	57,977원	0원	감 57,977원
연금보험료	660,274원	0원	감 660,274원

- 미사용 보험료 감액

3		계약금액 조정

공 종	당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비 고
계	금78,185,990원	금29,261,900원	감3,816,100원
도 급 비	금29,275,660원	금26,093,546원	감3,182,114원
부 가 세	금2,927,565원	금2,609,354원	감318,211원
사용전 검사비	금874,775원	금599,000원	감315,775원	부가세포함 금액임

❍ 계약변경 금액(제경비포함)

구 분			당 초	변 경	증·감 액	비 고
순공사원가	재료비	직접 재료비	7,886,982	8,814,994	증948,012
		소 계	7,886,982	8,814,994	증948,012
	노무비	직접 노무비	13,068,991	11,158,351	감1,910,640
		간접 노무비	1,045,519	892,668	감152,851
		소 계	14,114,510	12,051,019	감2,063,491
	제경비	산재 보험료	526,471	449,503	감76,968
		고용 보험료	122,796	104,843	감17,953
		건강 보험료	503,276	0	감503,276
		노인장기요양보험료	57,977	0	감57,977
		연금 보험료	660,274	0	감660,274
		산업안전보건관리비	434,794	434,794	0
		기 타 경 비	1,230,964	1,168,497	감62,467
		소 계	3,536,551	2,157,637	1,378,914
순공사원가 합 계			25,518,043	23,023,650	감2,494,393
일 반 관 리 비			1,531,080	1,381,030	감150,050
이 윤			2,875,823	2,338,153	감537,670
고 재 처 리 비			-649,287	-649,287	0
도 급 액			29,275,660	26,093,546	감3,182,114
부 가 세			2,927,565	2,609,354	감318,211
사 용 전 검 사 비			874,775	614,900	감259,875
합 계			33,078,000	29,317,800	감3,760,200

- 계약변경 세부내역

4		향후계획

❍ 위 변경 사유와 같이 공사계약 물량변경(증,감) 및 제경비 정산을 포함하여

도급업체와 변경(정산) 계약을 하고자 함

❍ 행정사항

- 관리과에 변경계약 요청

붙 임 : 1. 기술검토의견서 1부.

2. 준공(정산)내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 고용,산재 가입완납 증명원 1부.

5. 산업안전보건관리비 사용내역 1부

6. 사용 전 검사 실시 확인서 등 1부. 끝.