문서번호	도시계획과-7681
결재일자	2020.6.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	종합계획팀장	도시계획과장
김래연	심재욱	06/05 최진석

도시계획정보시스템 및 도시계획포털 유지관리용역 월 간 보 고 (2020.5월)

2020. 6.

도시계획정보시스템 및 도시계획포털 유지관리용역 월 간 보 고 (2020.5월)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2020년 UPIS 및 도시계획포털 유지관리 용역

○ 용역기간 : 2020. 01 .01 ~ 2020. 12. 31

○ 용 역 비 : 174,000 천원

○ 용 역 사 : 주식회사 텔루스

○ 과업대상

구 분	시스템명	세부내용
응용 프로그램	도시계획 정보시스템	○ 도시계획입안·결정시스템 ○ 도시계획 인트라넷 ○ 3D 의사결정지원시스템 ○ 과밀부담금관리시스템
	도시계획포털	○ 도시계획포털(웹사이트)
소프트웨어	상용S/W	○ 웹서버 1식 (JEUS & WebToB) ○ 지도엔진 1식 (ArcGIS Server)

○ 과업내용

- 입안결정시스템 용도지역/용도지구 데이터 정확도 제고

- UPIS DB현행화(도시관리계획 입안·결정도면 편집 및 탑재) 및 유지보수

- 도시계획정보 베이스맵 DB갱신(연속지적도, 건물, 수치지형도 등)

- 시스템 운영 및 유지관리

- 상용 소스트웨어 유지관리(웹서버, GIS엔진)

- UPIS 입력대상 고시자료 모니터링 업무지원

- 헬프데스크 운영 및 지원

□ 주요추진내용

입안결정시스템 용도지역/용도지구 데이터 정확도 제고

○ 추진개요 : KRAS기준 주제도 누락 및 중복, 선형 불일치 등 오류사항 보완

○ 추진기간 : 2020.01 ~ 2020.06

○ 추진대상 : 용도지역, 용도지구, 개발제한구역(추가)

○ 추진절차

자료수급		CODE값 분류		CODE별 중첩확인		누락 및 선형 상이지역 추출		KRAS선형 >UPIS반영		고도화시스템 DB반영(변환)
‘20.01		‘20.1.~2.		‘20.2.		‘20.2.		‘20.2.~6.		‘20.6.

※ 도형이력관리기능 추가로 처리기간 1개월 연기

○ 검토대상

대상명	검토대상
	소계	누락지역	중복지역	상이지역
총계	11,124	7,609건	3,515건	4건
용도지역	10,970	7,609건	3,361건	-
용도지구	154건	-	154건	-
개발제한구역	4건	-	-	4건

○ 추진현황                                                 (2020.5.31.기준)

대상명	DB현행화대상
	소계	누락지역	중복지역	상이지역
총계	1,616건	580건	1,032건	4건
용도지역	1,612건	580건	1,032건	-
용도지구	-	-	-	-
개발제한구역	4건	-	-	4건

○ 추진내용

추진시기	추진내용	처리결과
2020. 1.	○ 관련자료 수집 - KRAS 및 UPIS 자료 - 용도지역(17개 CODE), 용도지구(20개 CODE)	완료
	○ 자료검토를 위한 용도지역/용도지구 세부유형별 정리 (CODE값별 분류)	완료
2020. 2.
	○ KRAS기준 “용도지역” 누락지역 검토대상 추출 - 검토대상 : (도형건수) 7,609건, (도형면적) 553,017㎡	완료
2020. 3.
	○ KRAS기준 “용도지역” 중복지역 검토대상 추출 - 검토대상 : (도형건수) 3,361건, (도형면적) 6,576,479㎡ ○ KRAS기준 “용도지구” 중복지역 검토대상 추출 - 검토대상 : (도형건수) 154건, (도형면적) 6,760,489㎡	완료
2020.4.	○ KRAS기준 “용도지역” 누락지역 검토 및 DB현행화 (도형건수 : 807건, 도형면적 : 492,512㎡)	완료
	○ “개발제한구역” 자료 수급 및 검토대상 확인 ※ 업체와 협의하여 과업대상 추가	완료
2020.5.
	○ 용도지역 ‘누락지역’ 검토 및 DB현행화 ○ 개발제한구역 검토 및 DB현행화	완료
	○ 개발제한구역 상이지역 검토	진행중

구분/월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
1. 용도지역	UPIS & KRAS 자료 수집	누락 및 중복 대상 추출 & 세부유형별 분류		누락대상 검토	누락지역 현행화	중복 및 상이 대상 검토 & 현행화
2. 용도지구		-	중복대상 추출	상이대상 검토		상이 대상 현행화
3. 개발제한구역	※개발제한구역 정합성 추가 요청사항			공간정보포털 자료 수집	상이대상 검토 & 현행화	-

데이터 현행화

구 분

접수 및 처리내용

처리결과

향후계획

자료

○ 연속지적도 갱신 (월별)

○ 타법 갱신 (분기)

정상처리

○ 연속지적도 갱신 (월별)

고시

도면

○ 요청대상

고시목록 관리기준일	요청건수	관리대상 (고시 / 조서)	비관리
‘19.10.01~’20.09.30	263건	256건 / 787건	7건
‘19.10.01 이전	2건	2건 / 5건	-

○ 처리현황

고시목록 관리기준일	관리대상	완료	진행 중	미처리
‘19.10.01~’20.09.30	226건	169건	31건	56건

○ 2020.5월 현행화 실적

고시목록 관리기준일	관리대상	완료	진행 중	비관리
‘20.05.01~’20.05.31	48건	26건	21건	1건

※ 19년도 5월 실적(43건) 대비 112%

구 분	접수 및 처리내용	처리결과
운영지원	별도 지원사항 없음	-
사용자지원	○ UPIS 프로그램 설치 지원, 오류처리, 사용법 문의 등 - 고도화서비스 중단으로 전월대비 설치 요청 증가 (50%)	38건
기타지원	[ 도시계획입안결정지원시스템 ] ○ 데이터 백업구성방안 검토 - 에스리와 협의하여 최종 이관방안 협의 완료 - 작업계획서 제출 완료 [ 3D 의사결정지원시스템 ] ○ DB 추출자료대상으로 위원회별 안건자료 정리	2건
시스템점검	○ H/W, S/W 시스템 운영 점검(내부 점검 시행)	1건

업무지원

시스템 정기점검

○ 서버 점검

서버명	성능	네트워크 상태	디스크 상태	소프트 웨어	에러
Web Application Server	양호	양호	양호	정상	없음
Web Server 1	양호	양호	양호	정상	없음
Web Server 2	양호	양호	양호	정상	없음

○ 어플리케이션 점검

서버명	대상기능	점검결과		비 고
		정상	비정상
도시계획정보시스템	18개	18개	-
3D의사결정지원시스템	9개	9개	-
도시계획인트라넷	8개	8개	-
도시계획포털	15개	15개	-

시스템 장애처리

○ 장애처리 요청 내역

합계	응용프로그램	웹서버	DB	서버	기타
-	-	-	-	-	-

○ 장애처리 요청 내역 상세

구분	일 시	장애원인&내용	조치사항	조치결과
-	-	-	-	-

기타사항

○ 유지보수인력 근무상황

성 명	근무내용	근무대상	근무일	비근무일	비고
조 혜 정	시스템 운영 지원	19일	19일	-
김 선 화	데이터 현행화	19일	19일	-

□ 차월 추진계획

구 분

6월 추진계획

데이터

정확도

제고

○ UPIS<>KRAS간 용도지역/용도지구 정합성 검토 및 보완

자료수급		CODE값 분류		CODE별 중첩 확인		누락 및 선형 상이지역 추출		KRAS선형 >UPIS반영		고도화시스템 DB반영 (변환)

- “용도지역” 누락 사항 반영 도형(대상) 최종 현황 탑재

- “용도지역/지구” 중복지역 자료추출 변경대상(삭제) 검토 > 보완 > 탑재

- “용도지역/지구” 선형 상이지역 검토 > 보완 > KRAS 선형 탑재

- “용도구역” 개발제한구역 선형 상이지역 검토 > 보완 > KRAS 선형 탑재

UPIS

(입안결정)

○ CS버젼 기능 백업

- 시스템 분석기능별 조회 및 결과화면 이미지로 저장

- 기능화면 사용순서별 작업

○ UPIS CS버젼 운영 종료에 따른 안내 공지

- 시스템 종료일(6.30) 15일 이전 ‘공지사항’ 게시판 게재

○ UPIS CS버젼 운영 종료 작업처리 (2020.6.30.(화) 19시~)

- UPIS  접속을 막기 위해 사용자 권한 회수

(user정보 권한을 ‘삭제’로 변경, 도시계획과, 유지보수직원 제외)

- 도시계획포털(CS버젼용)의 시민접속을 막기 위해 웹서버 중지 (고도화서비스 시행)

3D

의사결정

지원

시스템

○ 3D 의사결정지원시스템 운영 종료 및 자료 이관 (2020.6.10.)

- 시스템 접속을 막기 위해 사용자 권한 회수

- 위원회자료 이관

(2019년 이후자료 Virtual Seoul시스템으로 이관, 위원회별 자료 부서 위원회 담당에게 송부)

시스템

점검

○ 서버 및 어플리케이션 점검

붙임  1. 도시계획 고시/조서 현행화 내역서 1부.

2. 시스템 운영내역 1부.

3. 헬프데스크 처리내역서 1부.

4. 시스템 정기점검보고서 1부.

5. 유지보수직원 출근부 1부.  끝.