문서번호	시설보수과-5469
결재일자	2020. 10. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
신동헌		김준섭	10/15 변봉섭
협 조

설계변경 (정산) 보고

(2020년 봉천천복개 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  10.

남부도로사업소

(시설보수과)

설계변경(정산) 보고

(2020년 봉천천복개 보수공사)

「2020년 봉천천복개 보수공사」의 보수물량 변경 및 신규 공종

발생에 따른 설계변경(정산) 보고사항 임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 봉천천복개 보수공사

○ 공사기간 : 2020. 4. 27. ~ 10. 23.

○ 공사구간 : 관악구 봉천동1665-6호 ~ 동작구 신대방동459-5호

○ 공사개요 : 재포장 45.06a, 교면방수 4,506㎡, 단면보수 572㎡

○ 도 급 비 : *************

○ 시 공 사 : 대진건설  대표 조규진

□ 설계변경 현황

○ 설계변경 사유 : 보수물량 변경 및 신규공종 발생

○ 설계변경 내용

가) 실정보고 및 추가작업지시에 의한 물량변경 및 신규공종 발생

- ***********************************************

‧ 신축이음장치 교체 작업 추가작업에 대한 수량 변경

- *******************************************

‧ 은천로 입구 교차로 무단횡단금지 시설 설치 (교통운영과)

- ***************************************

‧ 봉천동 923-8호 일대(J81~J82) 재포장 및 신축이음 물량변경

‧ 봉천로457 일대(J95~J103) 재포장 물량변경 및 신축이음 설치

- ********************************************

‧ 봉천로334 주변 재포장 물량 증가

나) 시공에 따른 주요 보수물량 변경

주요변경내역	수 량		증·감
	당초	변경
*****	***	*****	********
**********	*******	*******	********
*******	***	******	********
*********	*	***	*****
기 타	1식	1식

○ 사업비 변경내역

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	************	************	***************
도 급 비	************	************	***************
관 급 비	***********	************	***************
이 전 비	***********	***********	***************

- 예산과목

‧ 도로시설관리,하천복개구조물관리,봉천천복개보수,시설비 및 부대비,시설비 ***************

‧ 도시교통체계 및 소통개선,교통소통 및 안전관리강화,교통사고잦은곳개선,시설비 및 부대비

시설비 **************

□ 조치의견

○ 상기와 같이 신규공종 및 물량변경으로 증액되는 공사비에 대하여는  교통사고 잦은곳 예산 및 낙찰차액 활용 설계변경 후 정산코자 함.

붙임 1) 설계변경 사유서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 설계변경도면 1부.

4) 검증확인서 1부.

5) 실정보고 및 안전점검 지적사항 조치계획보고(별첨) 각 1부. 끝.