코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계 용역(2차수) 변경계약(준공기한 연기) 의뢰

1. 광화문광장추진단-4936(`21.6.17)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진하고 있는 「새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 변경계약(준공기한 연기) 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계 용역(2차수)

나. 계 약 자 : ㈜씨에이조경기술사사무소, ㈜유신, ㈜선인터라인건축사사무소

다. 변경사유 : 매장문화재 정밀발굴조사(`20.10~`21.6) 결과를 반영한 설계, 보완발전을 위한 설계, 유선 T자형(월대복원) 사전행정절차 이행 등을 위한 추가과업발생 및 절대기간 부족

***************************************

****************************************************************

마. 용역기간 : (당초)`19.3.22. ~ `21.6.30. → (변경)`19.3.22. ~ `21.12.31. (증6개월)

구 분	당 초	변 경	비고
총차	`19.3.22. ~ `21.6.30.	`19.3.22 ~ `21. 12. 31.
1차수	`19.3.22. ~ `20.12.22.	-	준공
2차수	`19.11.26. ~ `21.6.30	`19.11.26 ~ `21. 12. 31.	약26개월

붙임 (1) 준공기한 연기 방침서 1부.

(2) 합의각서 1부.

(3) 준공기한 연기 의뢰서 1부. 끝.

	광화문광장추진단장
주무관	장승권		광장계획팀장	강성필		광화문광장사업반장	06/18 임창수
협조자	계약1팀장	원종순
시행	광화문광장추진단-4945	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시 신청사 10층 광화문광장추진단	/
전화	02-2133-7716	/전송	02-2133-0894	/	jang06@seoul.go.kr	/	부분공개(5)