투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	설계용역외 1건 준공기한 연기 의뢰 (도시고속도로 연결로(화랑로 진출)설치 보완설계외 1건)

1. 서울특별시 도시기반시설본부 토목부-12081호(2021.06.24.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치 보완설계용역』외 1건에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

용 역 명	도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치 보완설계 용역	도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치 보완설계 건설사업관리(설계감리)용역
용역규모	폭 5.0m, 연결램프 1,479m (교량 779m) - 진출램프(북부간선도로→화랑로) 폭 5.0m, 연장 838.5m - 진입램프(화랑로→북부간선도로) 폭5.9m, 연장 640.8m	폭 5.0m, 연결램프 1,479m (교량 779m) - 진출램프(북부간선도로→화랑로) 폭 5.0m, 연장 838.5m - 진입램프(화랑로→북부간선도로) 폭5.9m, 연장 640.8m
계약기간	‘20.1.16.~’21.6.30.	‘20.11.20.~’21.6.30
용 역 비	680,400천원	85,420천원
계 약 자	㈜천일, ㈜동명기술공단종합건축사사무소, ㈜동희이앤씨, 씨지이앤씨㈜	㈜동일기술공사

나. 준공기한 연기 : 62일

1) 계약기간

가)설계용역 : 당초 '20.01.16.~'21.06.30.⇒ 변경 '20.01.16.~'21.08.31.

나)설계감리용역 : 당초 '20.11.20.~'21.06.30.⇒ 변경 '20.11.20.~'21.08.31.

2) 귀책소재 : 서울특별시

3) 지체상금 : 미 부 과

4) 연기사유 : 붙임 참조

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.   끝.

	토목부장
주무관	박희정		토목설계과장	김동현		토목부장	06/25 김용제
협조자
시행	토목부-12129	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2586	/전송	02-3708-2599	/	parkoran@seoul.go.kr	/	부분공개(5)