문서번호	도시관리과-6294
결재일자	2021. 6. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도시주거관리TF팀장	도시관리과장		도시계획국장
윤현주	유봉모	홍선기		06/25 이정화
협 조	전문관		장지광
	주무관		최승영

아파트지구 지구단위계획, 교통영향평가

용역 과업기간 연장 계획

2021. 06.

도시계획국

(도시관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

아파트지구 지구단위계획 및 교통영향평가

용역 과업기간 연장 계획

지구단위계획구역으로 전환을 추진 중인 ①청담·도곡, ②암사·명일,가락,아시아선수촌, ③화곡·이수·원효·이촌 아파트지구의 지구단위계획 수립 및 교통영향평가 용역에 대한 과업기간 연장 계획을 다음과 같이 보고함.

□ 용역개요

○ 추진근거

- 아파트지구 도시관리체계 개선 시행계획(행정2부시장방침 제80호, 2017.4.7.)

※ 아파트지구 전체를 지구단위계획으로 전환하여 종합적‧체계적 관리

○ 용역현황

구 분		용역업체	용역기간	용역대가
① 청담·도곡 아파트지구	지구단위계획	******** ********	********** * **********	*********
				******************* ********************
	교통영향평가	******	********** * **********	********
				******************* ********************
② 암사·명일·가락, 아시아선수촌 아파트지구	지구단위계획	******	********** * **********	*********
				******************* ********************
	교통영향평가	******	********** * **********	********
				******************* ********************
③ 화곡,이수,원효,이촌 아파트지구	지구단위계획	****** *******	********** * **********	*********
				******************* ********************
	교통영향평가	********	********** * **********	********
				******************* ********************

* 2020년 예산(시설비) 642,552천원 중 207,132천원 ’21년으로 사고이월

○ 용역대가 지급현황

- ***************************************

(단위: 천원,%)

구 분		총 용역비(A)	기 지급액(B)	잔액(A-B)	집행률
총계		*********	*********	*******	****
청담·도곡	지구단위	*******	*******	******	**
	교통영향	******	******	******
암사·명일·가락, 아시아선수촌	지구단위	*******	*******	******
	교통영향	******	******	******
화곡,이수 원효,이촌	지구단위	*******	*******	******
	교통영향	******	******	******

□ 추진현황

○ 현 추진현황(총 8개소)

- 결정고시 1개소, 위원회 심의 1개소, 주민열람 4개소, 계획(안) 수립 2개소

구 분		계획수립	열람공고	교통영향평가	위원회심의	결정고시*
청담·도곡
					’21.06.09.	(재)열람공고 예정
암사·명일·가락, 아시아선수촌	암사·명일
			’21.05.06.	*******************
	가락
			’20.12.03.	*******************
	아시아
			’21.05.06.	*******************
화곡,이수 원효,이촌	화곡
		****	*******************
	이수
			’21.01.14.	*********************
	원효
						’20.01.09.**
	이촌
		****	*******************

* ***************************************************************

**원효지구: 단일 단지(산호아파트) 아파트지구로서 ’20. 1. 9. 정비계획 결정 및 지구단위계획 수립

○ 세부 추진경과

- ’19.06.~10.  아파트지구 지구단위계획 수립 및 교통영향평가 용역 착수

- ’21.01.        이수 아파트지구 주민열람 완료

- ’21.03.        아파트지구 지구단위계획 전환지침 마련(행정2부시장방침 제31호)

- ’21.03.        청담·도곡 아파트지구 사전자문, 화곡 시·구합동보고회

- ’21.04.~05.  암사·명일 및 아시아선수촌 아파트지구 주민열람

- ’21.05.        가락 아파트지구 교통처리방안 전문가 자문회의 개최

- ’21.06.        청담·도곡 교통영향평가 및 도시·건축공동위원회 심의완료

【2021년 상반기 주요 추진실적】

구 분	청담·도곡	암사·명일·가락·아시아	화곡·이수·원효·이촌
실 적	교통영향, 공동위 심의	열람공고 (암사·명일, 아시아)	열람공고(이수), 시·구합동(화곡)

□ 계약변경 내용

○ 변경내용: 과업기간 변경(연장)

용역명(아파트지구)		과업기간
		당초	변경
청담·도곡	지구단위계획	’19.06.24. ∼ ’21.06.30.	***********************
	교통영향평가	’19.10.08. ∼ ’21.06.30.	***********************
암사·명일·가락·아시아선수촌	지구단위계획	’19.06.26. ∼ ’21.06.30.	***********************
	교통영향평가	’19.10.08. ∼ ’21.06.30.	***********************
화곡·이수· 원효·이촌	지구단위계획	’19.06.17. ∼ ’21.06.30.	***********************
	교통영향평가	’19.10.04. ∼ ’21.06.30.	***********************

○ 계약금액 : 변경없음

○ 변경사유

*********************************************

********************************************

○ 지체상금 부과여부 : 미부과(서울시 귀책사유)

□ 처리의견

○ *****************************************************************

□ 향후계획

○ ’21.06.   : 설계변경에 따른 변경계약 요청 (→재무과)

○ ’21.07.~ : 행정절차 이행

붙임  과업기간 연장 요청서 및 합의각서 각 1부.  끝.