투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(전체1회,1차2회) 계약의뢰[내부순환로(월곡IC)구조개선공사 건설사업관리용역]

우리 부에서 시행 중인「내부순환로(월곡IC)구조개선공사 건설사업관리용역」에 대하여 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 내부순환로(월곡IC)구조개선공사 건설사업관리용역

나. 용 역 비 : 금1,627백만 원(1차: 693백만 원)

다. 용역기간 : ’20. 2. 10.~’22. 11. 9.(1차: ’20. 2. 10.~’21. 7. 6.)

라. 용 역 사 : ㈜유신 외 1개사

마. 설계변경내역(전체1회, 1차2회)

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
용역비	***	*********	*********	**********
	***** ****	*******	*******	**********
용역기간	***	********** ************	********** ************	*
	***** ****	********** ***********	********** ************	*******

바. 변경사유

*****************************

********************

사. 예산과목

- 안전총괄실 도로계획과 도로 건설, 도로고속도로망 확충(도시개발특별회계), 내부순환로(월곡IC)진출연결로 신설, 시설비 및 부대비, 감리비

붙임  1. 보고서 1부.

2. 건설사업관리기술인 검토의견서 1부.

3. 변경내역서(총차1회 및 1차1회) 각 1부.

4. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	정원범		도시고속도로과장	장수철		토목부장	06/28 김용제
협조자	주무관	박상철		재무과장	代김미경
시행	토목부-12267	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	jwb831@seoul.go.kr	/	부분공개(5)