문서번호	행정지원과-13638
결재일자	2021. 6. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장		서부수도사업소장
이래운	강정환	박달경		06/30 김정일
협 조
	주무관		장은숙

「2022년도 투자사업」

청사 시설개선 계획

2021. 6.

서부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「2022년도 투자사업」

청사 시설개선 계획

우리 사업소 청사 시설물의 안전사고 방지 및 근무환경 개선을 위한 2022년도 청사 시설개선 계획을 보고드림.

Ⅰ				추 진 개 요

□ 추진근거: 2022년도 예산안 편성 추진계획(기획예산과-6344, 2021. 6. 7.)

○ 세출예산안 편성방향 中 직원 후생복지를 위한 사무환경 개선 추진

□ 추진목적

○ 사고 대비를 위한 노후 시설 정비 및 선제적 유지관리

○ 근무 만족도 증대 및 업무 효율성 증대를 위한 사무환경 개선

○ 청사 주차공간 부족에 따른 주차환경 개선

□ 2020년 사무환경개선 추진실적

○ 2021. 3. : 별관 옥상 휴게공간 조성

○ 2021. 4. : 사무용 집기(책상 및 파티션) 교체

○ 2021. 5. : 남자샤워실 환경개선

○ 2021. 6. : 청사 본관 옥외 휴게공간 조성

○ 2021. 6. : 시민고객민원실 휴게공간 조성

휴게공간 조성 (별관 옥상)	휴게공간 조성 (본관 5층 옥외)	휴게공간 조성 (시민고객민원실)	환경개선 (남자 샤워실)

□ 청사현황

○ 위    치: 서대문구 통일로 26길 41

○ 대    지: 6,285㎥(1,904.5평)

○ 건    물: 연면적 4,316㎡(1,306평)

- 본  관(5층): 연면적 3,547㎡(1,073평)

- 별  관(3층): 연면적   297㎡(90평)

- 팔각정(3층): 연면적   472㎡(143평)

○ 건축년도: 1966. 11. 12.(사업소 입주 1991년 - 대수선)

사업소 전경	사업소 측면 및 팔각정

Ⅱ				정 비 계 획

□ 청사 내부 시설 개선

1. 청사 난방용 온수보일러 및 관련배관 교체

○ 추진근거: ’22년 공공기관 난방기기 관련 예산 편성요청

[총무과-9206(2021. 6. 21.)호]

○ 목    적: 미세먼지 저감과 온실가스 감축, 에너지의 효율적 사용

○ 교체대상: 1대

보일러 종류	소비열량(kcal/h)	설치년도	수량	용도	비고
온수보일러	480,000	2011	1	청사 난방용

○ 공사내용: 친환경(저녹스) 보일러 설치 및 보일러 주변배관 교체 1식

○ 추진일정: ’22년 2월~7월

○ 소요예산: ********

2. 팔각정 체력단련실 및 샤워실 시설 개선

○ 목    적: 장기 사용으로 노후된 체력단련실 및 샤워실 시설개선을 통한 직원 복지 향상

○ 현    황

- 체력단련실 바닥재 노후 및 일부 파손 등으로 안전사고의 위험이 있으며,

- 팔각정 내 샤워실은 장기사용으로 인한 노후 및 별도의 탈의실이 없어  시설개선이 필요한 실정임.

체력단련실 바닥재 일부 파손	체력단련실 바닥재 노후	샤워실 타일 파손 및 수전 노후

○ 공사내용

- 체력단련실: 바닥재 교체 및 벽체 도장

- 샤워실: 바닥 및 벽체 타일교체, 천장재 및 수전 등 교체

○ 추진일정: ’22년 2월~7월

○ 소요예산: ********

▸ 산출내역: ****************************************

□ 청사 외부 환경개선

1. 청사 주차공간 확충

○ 목    적: 청사 내 유휴부지를 활용한 주차장 확충으로 주차난 완화

○ 주차장 현황: 총 37면

구분	일반	전기차	경차	장애인	비고 (보유차량)
주차면수	26	8	2	1	35대

- 청사 주차장 확보율은 보유차량 대비 105%이나 청사 입주 업체 차량과 시민고객 방문차량 등을 고려하면 주차면수가 부족한 실정이며

- 급속 전기차 충전기(3개면)는 직원뿐 아니라 시민고객도 이용가능한   개방형 충전시설로 상시 충전을 위해 장시간 주차가 어려운 실정으로  주차난 해소를 위한 주차공간 확충 필요

*****************

○ 공사내용: 주차면수 확충(2.5m×5m, 5개면)

- 조성위치: 전기차 완속충전기 옆 유휴부지

- 주차면수: 5개면

주차장 조성위치	주차장 조성계획

○ 추진일정: ’22년 2월~9월

○ 소요예산: ********

2. 청사 진입로 미끄럼방지 포장

○ 목    적: 경사진 청사 진입로의 미끄럼방지 포장을 통한 차량 안전사고 방지

○ 현    황

- 청사 진입로는 장기사용으로 인한 노후 및 부분 파손되어 차량 밀림 등으로 인한 안전사고 발생 우려가 있어 개선이 필요함

진입로 포장재 일부 파손 및 노후	진입로 미끄럼방지 포장재 노후

○ 공사내용: 미끄럼방지 포장 520㎡

○ 추진일정: ’22년 3월~5월

○ 소요예산: ********

▸ 산출내역: **************************

3. 전기차 충전기 주차면 차양시설 설치

○ 목    적: 차량 충전 중 발생할 수 있는 전기사고 예방

○ 현    황

- 현재 우리 사업소는 전기차 충전기 6기(급속 3기, 완속 3기)가 설치되어 직원뿐 아니라 많은 시민고객이 이용중인 시설로

- 전기차 충전기 이용 시 비나 눈에 의한 감전 및 동절기 고드름 낙하 등에 의한 사고방지를 위한 차양시설 설치 필요

전기차 급속충전기 주차면(3면)	전기차 완속충전기 주차면(3면)

○ 공사내용: 차양시설 설치(3개소, 125㎡)

○ 추진일정: ’22년 3월~7월

○ 소요예산: ********

▸ 산출내역: **************************

Ⅲ				소 요 예 산

□ 추정 사업비: *********

구 분	사업비(천원)	비 고
청사 내부 시설개선	*******
청사 외부 환경개선	*******
총사업비	*******

Ⅳ				향 후 계 획

□ 2022년 사업예산 반영 및 제출(기획예산과).  끝.