투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청

1. 도시철도계획부-4500(2020.05.25)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행중인 「위례선 도시철도 기본계획 수립 용역」의 준공기한 연기를 아래와 같이

요청하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 위례선 도시철도 기본계획 수립 용역

2) 계약기간 : 2019.8.13. ~ 2020. 6. 7.

3) 계약금액 : 819,894,000원

4) 계 약 자 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소 외 8개사

나. 준공기한 연기 내역

구 분	당 초	변 경
계약기간	2019.8.13. ~ 2020.6.7.	2019.8.13. ~ 2020.9.7.
계약금액	변경없음

다. 연기사유 : 총사업비 조정 협의기간 소요에 따른 준공기한 연기

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	도시철도계획부장
주무관	안창호		도시철도설계과장	강명석		도시철도계획부장	06/03 김용학
협조자	주무관	임양수
시행	도시철도계획부-4718	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스빌딩 10층	/
전화	02-772-7131	/전송	02-772-7135	/	changho@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)