문서번호	토목부-13711
결재일자	2020.7.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	07/13 김용제
협조

돈화문로10길 이면도로 접속부 포장면 변경 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

2020. 07.

도시기반시설본부

(토  목  부)

돈화문로10길 이면도로 접속부 포장면 변경 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』의 실정보고(돈화문로 10길 접속부 포장변경)건과 관련 검토하고 결과를 보고 드림.

****************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

□ 창덕궁감2020-185호(2020.07.10.): 실정보고 건 제출(돈화문로10길 접속부 포장변경 건)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

□ 규    모: 도로정비 B=6.5~22m, L=1,630m

□ 사업기간: ’18.12.26. ~ ’20.08.31.

□ 도 급 비: 6,725백만원(1차 5,800백만원, 2차 925백만원)

**************************

************************

Ⅲ		보 고 내 용

□ 이면도로 접속부 보도확장에 따른 차량진입 불가로 민원발생

○ 돈화문로10길 보도확장에 따른 이면도로(피마길 외 6개소) 접속부에 차량진출입시설(보차도경계석 높이 5cm)이 없어 민원발생

○ 민원 발생에 따라 돈화문로10길 이면도로 접속부 시공과 관련 종로구청에 협의 요청

□ 종로구 협의결과에 따라 이면도로 접속부 포장면 변경 시행

○ 돈화문로10길 이면도로 접속부에 대한 종로구 협의한 결과 차량출입이 가능하도록 포장면 변경 요구(종로구 주거재생과-17945호, ’20.06.18.)

○ 이면도로 접속부 평면도(돈화문로10길)

구 분	평 면 도
당 초
변 경	① ② 돈화문로10길 ④ ⑤ ⑥ 서 순 라 길 ③
범 례	아스콘포장, 석재포장-A, 석재포장-C 석재포장-E

○ 포장단면 비교표

***	****	****
**** ****** ********	*	*
* ****** ********	*	*
******* ****** ********	*	*

□ 물량 및 공사비 증·감 현황

○ 주요공종 수량 증·감 현황

***	***	***	***			***
			***	***	***
******	****	*	****	****	*****
********	*********	*	***	***	****
********	*********	*	*	**	**
********	*********	*	*	**	**
*****	******	*	***	***	*
******	****************	*	***	***	**

○ 공사비 증·감현황

(단위 : 원)

****		****	****	***
* * *	****	************	************	**********
	*****	***********	***********	*********
	*	************	************	**********
*****		************	************	*********
*******		*	********	*******
*******		************	************	**********

※ 기존단가(신규비목이 없음)를 적용하여 공사비 산출

□ 책임건설사업관리기술자 검토의견

○ 피맛길 접속부 2개소는 차량진출입 과다로 인한 파손예방을 위해 차도석재포장 형식(Type-E)적용하며, 율곡로10길 접속부1개소(당초:아스콘) 구간 포함 총 3개소를 같은 형식 적용하여 민원최소화 및 내구성 확보.

○ 돈화문로10길 이면도로 접속부 구간은 원동기 등의 진출입으로 인한 파손예방을 고려하여 보도석재포장(Type-C)를 적용하여 공사의 원활을 꾀하고자 함.

○ 해당 실정보고는 합리적으로 계상 및 적용되었다고 사료되며 추후 설계변경시 반영·조치함이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		조 치 의 견

□ 돈화문로10길의 이면도로 접속부 민원 및 종로구 협의결과를 반영한 포장단면 변경은 책임건설사업관리기술자 검토의견과 같이 적정하다고 판단되며,

□ 우선 도급자에게 시공하도록 하고, 추후 설계변경시 반영하여 정산하고자 함.

붙임: 실정보고건(돈화문로10길 접속부 포장변경건) 제출 공문 1부.  끝.