문서번호	토목부-14518
결재일자	2020.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	07/24 김용제
협조

건설사업관리용역비 증액요청 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

2020. 07.

도시기반시설본부

(토  목  부)

건설사업관리용역비 증액요청 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역』의 실정보고(감리비 증액 요청)건과 관련 검토하고 결과를 보고 드림.

***********************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

□ 창덕궁감2020-196호(2020.07.17.): 실정보고건 제출(감리비 증액 요청)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 용 역 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역

□ 규    모: 창덕궁 현장, 고덕교 현장, 종각역 현장 감독권한대행

□ 사업기간: ’19.04.04. ~ ’20.10.03.

□ 도 급 비: 1,292백만원(창덕궁 1,000백만원, 고덕교 및 종각역 292백만원)

************************

Ⅲ		보 고 내 용

□ 종로구청 요청사항 반영 등에 따른 공사기간 연장 발생

○ 종로구청 요청사항 재설계 및 재시공 요구에 따른 절대공기 부족으로 공기 연장

○ 공사기간 변경내용 : ’19.12.31. → ’20.09.30(9개월 연장)

□ 공사기간 연장과 안전 강화 시행에 따른 감리원 투입인원 증가

○ 창덕궁 현장의 공사기간을 연장함에 따른 공사기간(+1개월)에 대한 감리 투입인원 증가

○ 감리원 7.4제 시행에 따른 창덕궁 야간공사 안전강화를 위한 야간감리 추가 투입(토목부-18400호, ’19.10.11)

□ 투입 인원 및 용역비 변경현황(창덕궁 현장만)

○ 투입인원 변경현황

***	**	***			**
		**	**	***
*******	**	*****	*****	****
*******	**	****	****	***
**********	**	****	****	****
*		*****	*****	*****

○ 용역비 변경현황

(단위 : 천원)

*****	****	****	***
*****	*********	*********	*******

□ 책임건설사업관리기술자 검토의견

○ 종로구 요청건 반영 등으로 인해 발생된 공기연장에 의한 감리원 추가 투입필요

- 공사 준공일이 2020.09.30.이므로  감리용역 준공일을 2020.10.31.로 반영

- 토목, 전기 감리원 추가 투입 발생(7.49개월)

○ 창덕궁 현장의 작업이 야간에 시행됨에 따라 도시기반시설본부 지침(7.4제)에 의한 야간감리원 추가투입(4.05개월) 발생

○ ****************************************************************************************

○ 본 공사의 품질관리, 안전관리 및 빈틈없는 현장관리를 통해 공사의 원활한 운영관리를 도모코자 함.

Ⅳ		조 치 의 견

□ 공기연장에 따른 감리 투입인원 증가 및 추가 투입 적정

○ 감리원 투입인원 증가 및 야간감리원 추가투입 등에 대해 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하다고 판단되므로 실정보고 내용을 승인하고자 함.

□ *****************************

****************************************************************************************

*********************************************************************************************************************

붙임: 실정보고건(감리비 증액 요청) 제출 공문 1부.  끝.