투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(역사도심재생과장)
(경유)
제목	창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 시설비 예산변경 요청

1. 우리본부에서 시행하고 있는 『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』과 관련입니다.

2. 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업에 소요 감리비가 부족하여 시설비에 대해 다음과 같이 예산변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

나. 변경사유: 공사의 준공기한 연기에 따른 감리 투입인원 증가와 야간공사 시행에 따른 감리원 추가 투입으로 소요 감리비가 부족하여 시설비를 감리비로 변경 사용하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

다. 예산변경 내역

(단위 : 천원)

예산과목					예산현액 (사고이월)	변경 요구액		변경 후 예산 (사고이월)
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
지속가능한 역사문화 도심 구현	도심역사 문화자원 관리	창덕궁 앞 도성한복판 역사인문재생 사업	시설비 및 부대비(401)	시설비 (01)	13,390,000 (10,906,175)	-	150,000	13,240,000 (10,756,175)
			시설비 및 부대비(401)	감리비 (02)	1,000,000 (599,049)	150,000		1,150,000 (749,049)

붙임  1. 예산변경요구서 1부.

2. 실정보고 검토보고서 1부.

3. 설계내역서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이성열		광역도로과장	박일연		토목부장	07/27 김용제
협조자
시행	토목부-14615	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	san730@seoul.go.kr	/	부분공개(5)