투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 변경계약 의뢰(총차8회, 3차3회)

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업』과 관련하여 변경계약(총차 8회, 3차 3회)을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

나. 계약금액 : 총차 17,411,412,500원

3 차   3,913,373,500원

다. 공사기간 : 총차  2017. 09. 13 ∼ 2021. 06. 30

3 차  2020. 07. 31 ~ 2021. 06. 30

라. 시공업체 : 엘림종합건설(주) 외 2

마. 변경사유 : 실정보고 사항, 물량증감 등 수량정산 사항 반영

바. 변경내역

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증․감
계약 금액	총차	17,411,412	17,212,874	감)198,538
	3차	3,913,373	3,714,835	감)198,538
공사 기간	총차	2017.09.13 ∼2021.06.30	2017.09.13 ∼2021.06.30	변경없음
	3차	2020.07.31 ∼2021.06.30	2020.07.31 ∼2021.06.30	변경없음

사. 예산과목 : (공기업하수도사업특별회계) 물순환안전관, 물재생시설과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비 및 부대비, 시설비, 물재생시설개선, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치

붙임  1. 방침서 1부.

2. 변경내역서(총차) 1부.

3. 변경내역서(3차) 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
★주무관	유시혁		환경시설과장	오열상		방재시설부장	06/30 박홍봉
협조자	재무과장	代김미경
시행	방재시설부-8566	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)