문서번호	도로보수과-6206
결재일자	2021. 7. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		윤옥광	07/01 김영철
협 조
	주무관			이이용

『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

설계변경(제1회) 검토 보고

2021. 07.

서부도로사업소

(도로보수과)

『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

설계변경(제1회) 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)와 관련, 우기 대비 도로사면 안전점검 결과 및 도로옹벽(한남동 산 10-57) 야간 공정 변경에 대한 추가 재배정액에 대해 설계변경을 실시하고자 함.

□ 추진근거

○ 2021년 우기 대비 도로사면 안전점검실시 결과 제출 및 예산 재배정 요청

- 도로보수과-5040(’21.05.27.)호

○ 2021년 도로사면 정비 예산 추가 재배정 요청

- 도로보수과-5795(‘21.06.21.)호

○ 2021년 도로사면 정비 예산 재배정 알림(3차)

- 도로관리과-9359(‘21.06.24.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2021.03.26. ~ 12.31.

○ 시 공 사 : ****

○ 도 급 비 : ***********

- *****************************

*********************

- *********************************

*********************

○ 공사규모

- 과속방지턱 도색 31㎡, 미끄럼방지포장 272㎡, 사괴석포장 보수 4㎡, 경고등 설치 6개소, 충격흡수시설 보수 5개소, 시설물세척 15,160㎡, 옹벽표면보수 322.5㎡, 옹벽단면보수 198.85㎡, 옹벽균열보수 73.44m, 기타공정 등

□ 설계변경 시행

① 2021년 우기 대비 도로사면 안전점검 실시 결과에 따른 추가 예산 재배정액 사용

○ 추가 재배정액 : 금 78,000천원

- 2021년 우기 대비 도로사면 안전점검 실시 결과, 도로옹벽 4개소 보수ㆍ보강이 필요한 건에 대해 추가적으로 재배정된 예산에 대하여 설계변경 시행

- 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물관리, 도로사면 붕괴 예방을 위한 보수ㆍ보강, 시설비 및 부대비, 시설비

② 도로옹벽(한남동 산 10-57) 보수ㆍ보강 사업 추가 예산 재배정액 및 낙찰차액 사용

○ 추가 재배정액 : 금 46,000천원 / 예산집행잔액 : 21,700천원

- 도로옹벽(한남동 산 10-57) 보수ㆍ보강과 관련, 주간공정에서 야간공정으로 변경에 대해 추가 재배정 예산 및 예산집행잔액을 사용하여 설계변경 시행

‣ 변경사유 : 해당구간은 북한남삼거리 한남대로 상으로 주간 차량 주행량이 많아 관할경찰서에서 주간 공사가 불가하다고 하여 불가피하게 야간공사 시행 필요[붙임 3 참조]

- 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물관리, 도로사면 붕괴 예방을 위한 보수ㆍ보강, 시설비 및 부대비, 시설비

③ 1~2차 작업완료 건에 대해서 물량 증ㆍ감 시행

※ 도로사면 붕괴 예방을 위한 보수ㆍ보강 사업 예산의 추가 재배정액분을 제외하고 계약 금액(도로부속시설물 일상 유지관리 사업예산) 변동 없음

④ 설계변경 내역

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

공 사 명	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
*******	***********	***********	*************
*****	***********	***********	*************

○ 주요공정 및 수량 변경내역

① 2021년 도로부속시설물 일상유지보수
연번	공 종	규격	단위	수량		증ㆍ감
				당초	변경
1	과속방지턱 도색		㎡	31.00	52.50	증	21.50
2	과속방지턱 설치	B=3.6m,H=0.1m	m	1.00	12.00	증	11.00
3	콘크리트 표면보수	레미가드(벽체)	㎡	1.00	590.00	증	589.00
4	콘크리트 균열보수	B=0.3㎜,T=100㎜	m	33.00	170.00	증	137.00
5	콘크리트 실링보수	B=20㎜, t=30㎜	m	0.00	4.00	증	4.00
6	개방형 중앙분리대 철거		경간	10.00	4.00	감	6.00
7	반사페인트칠		㎡	10.00	1.00	감	9.00
8	구조물세척		㎡	15,160.00	14,610.00	감	550.00
9	보도용블록 철거		㎡	7.00	1.00	감	6.00
10	블록 철거(야간)		㎡	0.00	5.40	증	5.40
11	장애인블럭 설치(야간)	점자/유도	㎡	0.00	5.40	증	5.40
12	경고등설치	1구, 쏠라	개소	6.00	2.00	감	4.00
13	충격흡수시설보수		개	5.00	7.00	증	2.00
14	안전시설비		㎡	3,486.00	3,500.00	증	14.00
② 도로옹벽(한남동 산 10-57) 보수ㆍ보강
연번	공 종	규격	단위	수량		증ㆍ감
				당초	변경
1	콘크리트 표면처리	그라인딩	㎡	322.50	0.00	감	322.50
2	콘크리트 표면처리(야간)	그라인딩	㎡	0.00	112.80	증	112.80
3	콘크리트 표면보수	레미가드(벽체)	㎡	322.50	0.00	감	322.50
4	콘크리트 표면보수(야간)	레미가드(벽체)	㎡	0.00	112.80	증	112.80
5	콘크리트 치핑		㎡	198.85	0.00	감	198.85
6	콘크리트 치핑(야간)		㎡	0.00	285.50	증	285.50
7	콘크리트 단면보수	벽체, T=10mm	㎡	198.85	0.00	감	198.85
8	콘크리트 단면보수(야간)	벽체, T=20mm	㎡	0.00	285.50	증	285.50
9	콘크리트 균열보수	B=0.3㎜,T=100㎜	m	40.44	0.00	감	40.44
10	콘크리트 실링보수	B=20㎜, t=30㎜	m	2.30	0.00	감	2.30
11	콘크리트 실링보수(야간)	B=20㎜, t=30㎜	m	0.00	26.10	증	26.10
12	차수방호조인트 설치(야간)	오메가 #50	m	0.00	26.10	증	26.10
13	철근콘크리트 천공	Φ100, L=1.6m	공	15.00	0.00	감	15.00
14	철근콘크리트 천공(야간)	Φ100, L=1.6m	공	0.00	16.00	증	16.00
15	수평배수공 제작및설치	L=1.6m	공	15.00	0.00	감	15.00
16	수평배수공제작및설치(야간)	L=1.6m	공	0.00	16.00	증	16.00
17	안전시설비		㎡	4,000.00	0.00	감	4000.00
18	안전시설비(야간)		㎡	0.00	4,000.000	증	4000.00
19	트럭탑재형크레인		일	8.00	0.00	감	8.00
20	트럭탑재형크레인(야간)		일	0.00	8.00	증	8.00

□ 조치계획

○ 상기 보고내용을 반영하여 변경내역서(붙임1)과 같이 설계변경을 시행하고자 함

붙임 1. 설계변경 내역서(제1회) 1부.

2. 도로사면 추가 재배정 관련 공문 3부.

3. 도로옹벽(한남동 산 10-57) 도로공사 신고 확인서(야간) 1부 .  끝.