투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	『잠수교남단 지하차도 침수감지장치 설치공사』 준공기한 연기요청

1. 기전과-5438호(2021. 7. 1.)와 관련입니다.

2.『잠수교남단 지하차도 침수감지장치 설치 공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 잠수교남단 지하차도 침수감지장치 설치 공사

나. 요청내역 : 준공기한 연기

요청내용	당초	변경
준공기한	’21.6.7.~’21.7.6.	’21.6.7.~’21.7.21.

다. 귀책사유 : 서울시 (지체상금 미부과)

라. 연기사유 : KT와의 통신 업무 협의 지연 및 통신 선로 확인 과정 필요

마. 공사금액 : 변경없음.

붙임  1. 방침서 1부

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 연기공문, 준공기한연기원, 합의각서 각 1부.  끝.

	기전과장
주무관	조소현		주무관	김해중		기전과장	07/01 석대창
협조자
시행	기전과-5470	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145 (대림동) 3층 기전과	/
전화	02-3284-5456	/전송	02-832-5470	/		/	부분공개(5)