문서번호	배수과-5857
결재일자	2021. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		배수과장
박종혁		07/01 김근용
협 조
	주무관		문정주

장기사용 송배수관 정비공사 추진실적(6월)

2021. 1.

상수도사업본부

[급수부]

장기사용 송배수관 정비공사 추진실적 (6월)

2021년도 장기사용 송배수관 정비공사 추진실적을 다음과 같이 보고 드림.

□ 현   황

○ 정비목표 : 14km

○ 사 업 비 : 37,307백만원

○ 발주건수 : 15건

구 분	계	중부	서부	동부	강서	남부	강남	강동	본부1)
발주대상(건수)	15	2	1	1	2	2	2	2	3
정비계획(㎞)	14	1.3	0.3	0.4	1.4	2.5	1.8	1.3	5.0
*** *****	******	*****	***	*****	*****	*****	*****	*****	******

※ 본부(시설비 10,247, 설계용역비 4,410, 시설부대비 및 대행사업비 1,150백만원)

□ 추진실적

○ 6월말 현재 정비실적 : 1.5㎞

구 분	계	중부	서부	동부	강서	남부	강남	강동	본부
정비목표	14	1.3	0.3	0.4	1.4	2.5	1.8	1.3	5.0
전월실적	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당월실적	-	0.2	-	0.1	0.2	0.8	-	0.2	-
실적누계	1.5	0.2	-	0.1	0.2	0.8	-	0.2	-
정비율(%)	7.1	15.3	-	25.0	14.3	32.0	-	15.3	-

□ 향후계획

○ 교통소통대책수립 용역 및 굴착허가 지연 등의 사유로 착공시기는 다소 부진하였으나 전체 공정 이상없이 추진중 임.

○ 매월 사업 추진실적을 점검하여 목표달성에 차질이 없도록 지속적인 모니터링 시행.  끝.