투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	납품기한 연기 의뢰(상암오수펌프장 탈취기 관급자재 구매, 제3자단가)

1. 「납품기한 연기 검토 보고」(시설보수과-2266호, 2021.6.30.)와 관련됩니다.

2. 「납품기한 연기 검토 보고」에 따라 “상암오수펌프장 탈취기 관급자재 구매”  사업의 납품기간 연기를 다음과 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명: 상암오수펌프장 탈취기 관급자재 구매

나. 계약금액: 금441,310,000원(금사억사천일백삼십일만원)

다. 계약일자: 2021. 3. 17.

라. 계약업체: 주식회사 유성엔지니어링(대표: 최순옥)

마. 계약 변경 내용

구 분	변경 후	변경 전	비고
계약금액	금441,310,000원	금441,310,000원	변경없음
계약기간	2021. 3. 17. ~ 2021. 9. 15.	2021. 3. 17. ~ 2021. 7. 15.	62일 연장

붙임	1. 납품기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 납품기한 연기 의뢰서 1부.  끝	.

	시설보수과장
주무관	양은조		시설팀장	우배용		시설보수과장	전결 07/02 代우배용
협조자
시행	시설보수과-2307	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)