문서번호	시설관리과-10949
결재일자	2021. 7. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
박홍	代박홍	김근태	07/02 박창석
협 조

우면산가압장 불용관 정비 및 급수체계 개선계획

2021.  7.

강남수도사업소

(시설관리과)

우면산가압장 불용관 정비 및 급수체계 개선 계획

암사저양정 급수체계 개선계획에 따라 ’20.10.월 전면 폐쇄된 우면산가압장 잔여 불용관 정비 및 급수체계 개선 계획을 보고 드림

□ 현황 및 문제점

○ ’20.10월 *암사저양정 급수체계 개선 완료

- 암사정수센터(저양정) 공급계통은 4개 지역배수지 운영수위가 비슷하고 공급경로가 길어(L=19㎞) 급수운영 어려움

*******************************************

- ’18~’20년까지 우면산가압장 급수체계 개선공사를 추진하여 ’20.10월 우면산가압장 가동을 중단하고, 양재가압장 통수 완료

○ ************************************ ************************

○ **********************************************

- *************************************

우면산가압장 위치도	전경사진	누수현황

□ 정비계획

○ 기본방향

- **********************************

- 암사저양정 가압직송 급수구역을 서초배수지 간접급수로 전환

	< 급수운영 검토 >
◆ 급수현황 : 개포동, 양재동 일대 24천세대(일평균공급량 21,600㎥) ◆ 서초배수지 간접급수 전환 가능 여부 : 체류시간 12hr 으로 ‘적정’ ※ 60,000㎥(서초배수지 시설용량) ÷ 120,000㎥(일최대공급량) × 24hr = 12hr

○ 주요내용

- **************************************

- ******************************

< 공급계통도 >

○ 공사발주

- 공사개요 : ********************************

- 입찰방법 : ********

○ 소요예산 : **********

- ’21년 장기사용 송배수관 정비 예산 활용

□ 향후계획

○ 계약심사 및 예산요청: ’21. 7월

- 본청 계약심사과 심사요청

- 기획예산과 설계 및 계약심사 이후 확정된 예산 재배정 요청

○ 공법선정위원회 개최 :  ’21. 7월

○ 공사시행 및 계약의뢰 :  ’21. 8월

○ 공사계약 및 착공 :  ’21. 9월

○ 공사준공 :  ’21. 11월

○ 서초배수지 급수운영 모니터링 : ’21.11.~12월

끝.