단수계획 보고(신사동)

주무관	시설운영팀장	시설관리과장		결재
황순미	김용만	07/05 이준호
협 조

문서번호 :	시설관리과-11951

은평구 신사동 30번지 일대 불용관-66 공사중 단수에 따른 단수계획을 아래와 같이 검토하여 시민불편을 최소화 합니다.

2021. 7. 5.

**********************황 순 미

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2021년 은평구 관내 상수도공사(장기계속)

❍ 공사개요 : 관종 확인을 위한 시편채취 및 *********** 설치

❍ 공사위치 : ①구간 : 신사동 30-1~30-24번지

②구간 : 신사동 31-1~31-11번지

❍ 공사일시 : 2021. 7. 6.(화) 10:00 ~ 18:00

□ 수계현황

❍ 급수수계 : *****

❍ 표    고 : *************************

❍ 급수계통도 : *****************************

□ 단수 추진계획

공사위치	단수지역	단수세대	단수일시	관로제원
신사동 30-1 ~30-24번지	․가좌로 312 ~ 312-19 ․증산로19길 30 ~ 증산로21길 29	30세대	2021.7.6.(화) 14:00~16:00	**************
신사동 31-1 ~31-11번지	․증산로19길 20 ~ 증산로21길 19	20세대	2021.7.6.(화) 10:00~12:00	**************

❍ 작업(단수) 시간 산출 : 2시간

- 관절단 및 퇴수(0.5시간) + 밸브설치 및 배관 접합(1.5시간) + 퇴수 및 통수(0.5시간)

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 계획

- 관 내부 유속 변화에 따른 혼탁수 퇴수를 위하여 설치한 다용도밸브를 이용하여 충분한 퇴수 시행

- 밸브 개폐시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

- 통수후 주변 수질상태 모니터링

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 위치도

※ 위치도(GIS) 별첨

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 상수도홈페이지 게재

- 공사용 자재 및 장비 사전 점검

- 교통정리원 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

붙임  1. 단수안내문 1부.

2. 위치도(단수검토) 1부.  끝.