문서번호	시설보수과-5842
결재일자	2021. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
송유진		오재영	07/06 김영철
협조
	주무관		권순회

- 남산1호·금화터널 관리사무소 -

정밀점검 추진 및 낙찰차액 사용계획 보고

2021. 7.

서부도로사업소

시 설 보 수 과

- 남산1호·금화터널 관리사무소 -

정밀점검 추진 및 낙찰차액 사용계획 보고

우리 사업소에서 시행중인 ‘남산1호터널 외 4개소 정밀안전점검’ 과 ‘금화터널 외 2개소 정밀안전점검’과 관련하여 각각의 관리사무소에 대한 건축분야 추가 과업지시를 위하여 낙찰차액을 사용하고자 함.

1		추진근거

❍ 도로시설물 안전 및 유지관리 실태감사 결과통보

- 안전감사담당관-6685호(2019.4.29.)

☞ 터널 안전점검 및 정밀안전진단 시 터널 관리사무소 건축물도 포함하여 안전점검 등을 실시하고 그 결과에 따라 보수․보강 조치 요함

❍ 터널 및 지하차도 관리사무소 유지관리 계획 통보

- 도로시설과-6895호(2021.6.30.)

☞ 관리사무소는 터널·지하차도 용역에 포함 시설보수과에서 시행

2		관리사무소 현황

구 분	관리사무소	연면적(㎡)	지 번	비 고
남산1호터널	필동	2,393.82	중구 예장동 산3-5
	한남	2,214.64	용산구 한남동 772-3
	중앙	980.24	용산구 한남동 산10-12
금화터널	현저동	182	서대문구 현저동 107-214

※ 남산2호·남산3호 터널은 2020년 정밀안전점검에 추가 과업지시 시행 완료

3		정밀안전점검 추진 계획

❍ 추진방법: 진행중인 정밀점검 용역에 건축분야 추가 과업지시

- 남산1호터널 외 4개소 정밀안전점검: 관리사무소 3개소 추가

- 금화터널 외 2개소 정밀안전점검: 관리사무소 1개소 추가

○ 용역 현황

구분	남산1호터널 외 4개소 정밀안전점검	금화터널 외 2개소 정밀안전점검
용역사명	㈜한국건설방재연구원	㈜한국시설안전연구원
용역기간	2021.3.24.~11.16.	2021.3.22.~10.19.
도 급 비	129,879천원	129,870천원
대상시설	남산1호터널, 불광천복개2구간, 봉원고가차도, 홍제교, 의주로지하차도	금화터널, 욱천복개1구간, 홍제천복개2구간
진행현황	현재 외관조사망도 작성 (공정률 70%)	현재 외관조사망도 작성 (공정률 62%)

※ 종합분야 안전진단 전문기관으로 건축분야 정밀점검 가능

❍ 소요예산: *********************************

- 금화터널: 기술용역타당성 심사 완료(제1151차, 2020.8.21.)

*************************

**********************************

4		낙찰차액 사용 및 조치계획

❍ 낙찰차액 사용 사유

- 관리부서(기전과)에서 관리사무소 정밀점검 필요 예산 미확보

- 따라서 우리 부서에서 시행중인 정밀점검용역의 낙찰차액 중 도로시설과 재배정 예산 활용

○ 가용예산

(단위 : 천원)

***********************************************************************************************************

❍ 조치계획

- 남산1호 관리사무소는 기술심사담당관에 기술용역 타당성심사 요청

- 심사 완료 후 기 추진중인 2개 용역에 추가과업 지시

- 추후 설계변경을 통하여 낙찰차액 반영·정산 조치

5		향후계획

❍ 2021. 7월중: 기술용역 타당성심사 요청 및 추가과업 지시

❍ 2021. 7. ~ 11. : 정밀안전점검 추진

❍ 2021.10. ~ 11. : 정밀안전점검 준공

붙임  1. 과업지시서 및 설계내역서 각 1부.(심사 요청용) 1부.

2. 설계내역서(금화터널) 1부.  끝.