문서번호	도로보수과-6110
결재일자	2021. 7. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장
정철식	07/05 한수영

2021년 관내 도로유지관리

건설폐기물운반 및 처리용역(2회)설계변경 검토 보고

2021. 7.

도 로 보 수 과

2021년 관내 도로유지관리

건설폐기물처리용역(2회)설계변경 검토 보고

중앙버스정류장 보도 턱 낮춤, 직영 폐아스콘, 도로함몰 예방공사 현장에서 발생되는 건설폐기물의 성상별 물량 증․감에 대한 설계변경 검토 보고임.

□ 용역개요

*********************************************

*****************************************

***************************

*****************************

□ 설계변경(2회)현황

❍ 금회(기간 변경없음)                                (단위 : 원)

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감(△)
계		**********	**********	증) 9,419,000
도급비	공 급 가 액	**********	**********	증) 8,562,727
	부가가치세	**********	**********	증) 856,273
	소 계	**********	**********	증) 9,419,000

- 주요변경내용

․ 직영 도로정비 폐아스콘 및 도로함몰 정비구간 발생폐기물 증가.

․ 중앙버스전용차로 보도 턱 낮춤공사 발생폐기물 반영.

- 성상별 변경물량 내역

구 분	규격	수 량				비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
*****	*	******	***	*	******	도로부속
****	*	******	***	*	******	직영,함몰
*****	*	****	****		*	맨홀정비
계		******	*****	*	******

□ 검토결과

❍ 중앙버스전용차로 흐름개선사업 추진계획 내 계약금액조정 여부

: 이행 (도로보수과-4964, 2021. 6. 3.)

❍ 중앙버스전용차로 흐름개선사업 : 증 6,000천원

노후포장도로 정비 : 증 3,419천원

□ 조치계획

❍ 폐기물처리용역의 원활한 추진을 위하여 상기 검토와 같이 설계변경 시행하고자 하며 계약부서에 계약금액 조정 내용을 통보 계약업무 후속절차를 시행.

붙임 1. 변경(2회)내역서 1부.

2. 중앙버스전용차로 흐름개선 추진계획 방침서 1부.

3. 합의각서 1부(별도).  끝.