문서번호	정수시설과-1868
결재일자	2021. 7. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	강북아리수정수센터소장
강석윤		김수영	07/05 신동호
협 조
	주무관			김금옥

‘상수도사업본부 발족 30년! , 수돗물 통수 111년! , 믿고 마시는 아리수’

[침전지 슬러지수집기 개량공사]

설계변경 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 7.

강북아리수정수센터

정수시설과

[침전지 슬러지수집기 개량공사]

설계변경 시행보고

『침전지 슬러지수집기 개량공사』보험료 등 제경비 사항에 대한 감액이 있어 아래와 같이 설계변경 시행코자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 침전지 슬러지수집기 개량공사

□ 사업기간 : 2021. 3. 12 ~ 9. 7

□ 계약금액 : 금318,229,620원

□ 계 약 자 : 대성산업씨엔에스(주)

□ 계약내역

◯ 침전지 1계열 6지 슬러지수집기 개량 1식(와이어로프, 시브 등 교체)

◯ 침전지 1계열 감속기 6대 교체(모터포함)

Ⅱ		설계변경 사항

□ 총괄변경 내용

○ 계약금액 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감액
총공사비	금318,229,620원	금295,471,000원	금22,758,620원(감)
공급가액	금289,299,655원	금268,610,000원	금20,689,655원(감)
부가세	금28,929,965원	금26,861,000원	금2,068,965원(감)

□ 주요 변경 내역

연 번	변경 사항	당 초	변 경	증․감
○ 제경비 감액
1	건강, 연금, 노인장기요양 보험료 미지급으로 인한 정산	5,968,632	-	감)5,968,632
1	퇴직공제부금 정산	1,648,964	357,500	감)1,291,464
1	산업안전보건관리비 정산	7,791,897	2,721,800	감)5,070,097
1	고용개선지원비 및 전자인력단말기 정산	5,210,668	600,000	감)4,610,668
2	경비금액 변경으로 인한 일반관리비 및 이윤 변경	30,789,217	27,422,737	감)3,366,480

Ⅲ		조치계획

□ 보험료 및 제경비 변경에 따른 설계변경 정산 시행

※ 설계물량 증·감 및 추가사항 발생에 대한 설계변경이 아니므로 자체 설계변경 심의위원회는 생략

붙 임 : 1. 설계변경내역서(안) 1부.

2. 검증확인서 1부.

3. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

4. 산업안전관리비 사용내역서 1부.

5. 고용·산재 보험료 완납증명서 등 각1부.

6. 합의각서 1부.  끝.