문서번호	급수운영과-9931
결재일자	2021. 7. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
안효민		이승우	07/08 代이승우
협조

현장 실정 검토 보고

(논현동 239번지 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사)

2021. 7.

강남수도사업소

(급수운영과)

현장 실정 검토 보고

(논현동 239번지 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사)

『논현동 239번지 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사』와 관련하여 공사시행 중 추가사항이 발생하여 당초 정비 계획을 변경하고자 아래와 같이 보고합니다.

공사개요

□ 공 사 명: 논현동 239번지 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사

□ 공사기간: 2021.4.8.~2021.10.4.

□ 공사개요: D=20~200mm, L=1,302m

□ 도 급 액: 528,470,280원

□ 도 급 자: 연세대토건(주) ******

서울시설공단 요청내용

□ 4구간 (신사동 646-2 ~ 646-22), 야간공사

- 현황 및 문제점

․ 당초 설계상 4구간 시점부(신사동 646-2번지)는 기존관 D80mm에 연결하게 되어있으나, 추후 개량 공사를 예상하여 정비계획 변경 필요.

********

검토의견

□ 4구간 상수도관 정비계획 변경

- 현장조사와 GIS도면 상 확인 결과 추후 개량 공사를 감안하여 아래와 같이 정비계획을 변경하고,

<공사개요>

① 기존 200mm 제수밸브 연결 시행(150mm, L=6m 부설)

② 기존 100mm 분기밸브에 연결 시행(150/100mm)

③ 기존 200mm G-gate 신설 (1개소)

- 압구정로46길에 부설된 DCIP/200mm의 중간제수밸브가 존재하지않아 단수 공사 시 다수의 영업집(약50점포)의 피해가 예상되므로 분기부에 부단수제수밸브를 설치하여 단수를 최소화 함이 타당하다고 판단됨.

********

처리계획

□ 상기 보고사항과 같이 서울시설공단에 작업지시하고 향후 설계 변경시 증·감분에 대하여 반영코자함.

<공사개요>

① 상수도관 :D=150mm, L=6m 부설 및 200/150mm 연결

② 상수도관 :D=150/100mm 분기밸브 연결

③ 제수변설치 : 기존관 200mm G-gate 신설

끝.