문서번호	기전과-5747
결재일자	2021. 7. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
조소현		이정호	07/08 代김해중
협조

『영등포역 고가 가로등 개선공사』

실정보고 검토보고

2021. 7.

남부도로사업소

(기 전 과)

『영등포역 고가 가로등 개선공사』

실정보고 검토보고

『영등포역 고가 가로등 개선공사』에 대해 업체로부터 공사실정 보고가 있어 내용을 검토하고 아래와 같이 조치코자 합니다.

▢ 추진근거

○ 실정보고서 제출(영등포역 고가 가로등개선공사 )

<또또전력공사 제21-7-1호(2021. 7. 1.)>

▢ 사업개요

○ 공 사 명 : 영등포역 고가 가로등 개선공사

○ 공사내용

- MH150W×6등, MH250W×40등 ⇒ LED100W×46등으로 교체

- 가로등주 40본 교체 (9m×1등용 34본, 9m×2등용 6본)

- 베이스커버(대형) 40개

○ 계약금액 : ******************************

○ 공사기간 : 2021. 3. 31. 〜 2021. 8. 13.

○ 계약업체 : **************

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로시설물 노후조명시설 개선, 시설비

▢ 실정보고 내용

○ 현황 및 문제점

- 영등포역 고가는 「철도안전법」제45조(철도보호지구안에서의 행위제한)에 의거 철도보호지구 행위신고 대상으로,

- 한국철도공단 수도권광역본부 시설처와의 협의 결과 철도운행안전관리자 1명, 철도전기안전관리자 1명, 열차감시원 2명을 추가로 선임 후 작업을 진행하여야 함.(등주 10본, 등기구 10등 해당)

작업약도(선로표시도)	현장전경

▢ 개략공사비

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	42,261,473	45,645,455	(증)3,383,982
	부가세	4,226,147	4,564,545	(증)338,398
	도급비계	46,487,620	50,210,000	(증)3,722,380

○ 예산조달방안 : 낙찰차액 사용 예정

(금액단위 : 원)

공 사 명	재배정 금액	계약 금액	낙찰 차액
영등포역 고가 가로등 개선공사	53,350,000	46,487,620	6,862,380

▢ 보고자 의견

○ 업체에서 제출한 실정보고 검토결과,

- 철도 안전운행 및 작업자 안전을 위해 철도안전관리자 등 추가 작업자 반영은 업체 및 한국철도공단 수도권광역본부의 의견대로 승인코자 하며

- 승인한 내역에 대하여는 낙찰차액을 사용하여 설계내역에 반영토록 조치코자 함.

붙임  공사 실정보고 공문, 선로작업계획서, 내역서 각 1부.  끝.