투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	2021년 한양도성 탐방로 정비공사 설계변경 시행 및 준공기한 연기 요청

1. 녹지관리과-2199호(2021.7.8.)와 관련입니다.

2.『2021년 한양도성 탐방로 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

1) 사 업 명: 2021년 한양도성 탐방로 정비공사

2) 사업기간: 2021. 5. 24. ~ 7. 12.

3) 도 급 자: **************

4) 도급금액: ************

나. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 감
*******		***********	***********	*
* * *	****	**********	***********	***********
	*****	*********	**********	**********
	****	********	********	*
	******	**********	***********	***********
****		**********	**********	***********

1) 설계변경 사유: *******************

2) 예산과목: 중부공원녹지사업소 녹지관리과, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성보전·정비, 한양도성 탐방로 조성 및 정비, 시설비및부대비, 시설비(예산편성부서:문화본부 한양도성도감)

다. 준공기한 연기

1) 기한연기

- 당 초: 2021. 5. 24. ~ 7. 12.

- 변 경: *****************************

2) 연기사유: **********************************

******************

3) 귀책소재 : 발주처

4) 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 설계변경 및 기한연장 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.

4. 준공기한연기의뢰서 1부.  끝.

	녹지관리과장
녹지관리팀장	김한섭		녹지관리과장	07/08 박기선
협조자	주무관	이지혜		재무팀장	김연호
시행	녹지관리과-2201	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3783-5949	/		/	부분공개(5)