실정보고 검토서

공사명

동부간선도로 확장공사(1공구)

공사개요

· 위 치 : 월계1교 ~ 녹천교

· 규 모 : 도로 확장 4→6차로, L=1.4km

· 공사기간 : ‘07.10.~‘21.06.

· 도 급 비 : 358백만원

· 시공사 : ㈜풍산건설 외1

· 감리단 : ㈜도화엔지니어링

· 설계사 : ㈜천일

실정보고 건명

도로 대장 및 준공 도서 작성 실정보고

실정보고

사유

- 공사 준공에 따라 관리기관 전환을 위하여 도로 대장 및 준공

도서를 작성코자하나 물량이 누락되어 있어 이를 반영코자

보고드림.

건설사업관리단

검토의견

- 원활한 관리기관 전환 및 유지관리 업무 수행을 위하여 누락된

도로대장 및 준공도서 작성비를 반영함이 타당함.

공기에 미치는 영향

0 개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고
도로대장 작성	2.7km	5.81km	-
준공도서 작성 (마이크로필름)	1식	-
준공도서 작성 (출력물, CD)	-	1식
금액	8,800천원	44,000천원	증)35,200천원

예산조치 계획

당초 사업비 범위 내 시행 가능

발주처

검토의견

건설사업관리단의 검토의견이 타당하여 승인 조치하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

결재

담당

권해엽

과장

장종환

부장

07/08

김용제