문서번호	도로보수과-6281
결재일자	2021. 7. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
이상구	이화신	07/08 고영준

『2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)- 북부』 설계변경(1회) 검토 보고

2021. 7.

2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)- 북부

설계변경(1회) 검토 보고

우리사업소에서 시행중에 있는『2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)』와 관련하여 굴착복구공사 의뢰 복구물량 증가에 따른 설계변경(1회) 검토 보고임.

관련 근거

○ 경동 제2021-1832호(2021.07.08.) : 건설사업관리용역(설계변경 요청)

○ 경동 2권역(북부) 2021-112호(2021.07.05.) : 건설사업관리용역(실정보고서)

공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)-북부

○ 공사규모 : 굴착복구 49a, 표층확복복구 83a, 절삭후덧씌우기 850a.

○ 공사기간 : 2021.04.05 ~ 2021.12.31

○ 공사금액 : 금5,039백만원(도급비 1,916, 관급비 2,276, 이전비 847)

○ 도 급 자 : (합)낙안이엔씨  대표 김복희

설계변경 내용

○ 실정보고(1회)에 따른 변경[도로보수과-6163(2021.7.5.)]

- 상수도 등 굴착복구공사 의뢰 복구물량 증가에 따른 수량조정 반영

주요변경 내용

○ 공사비 변경내역

(단위:원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비	5,039,049,500	5,039,049,500	-
도 급 비	1,915,549,500	2,480,049,500	증) 564,500,000
관 급 비	2,276,000,000	1,711,500,000	감) 564,500,000
이 전 비	847,500,000	847,500,000	-

○ 주요공종 변경내역

공 종	규 격	단위	수 량		증 ․ 감	비고
			당 초	변 경
소규모포장복구	야 간	a	49	128	증) 79
표층확폭복구	야 간	a	83	32	감) 51
절삭후 덧씌우기	야 간	a	850	350	감) 500

책임건설사업관리기술자 검토의견

○ 변경물량에 대한 수량 및 공사비 반영이 적정하다고 판단됨

조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 설계변경 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함 .

별첨 1. 건설사업관리용역(설계변경 요청서) 1부.

2. 건설사업관리용역(실정보고서) 1부.

3. 설계변경(1회) 내역서 1부.   끝.