문서번호	설비부-9639
결재일자	2021. 7. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
이창근	여인웅	07/08 김호성

- 중랑물재생센터 총인처리시설 설치사업 - 전기안전관리 상주(대행) 용역 설계변경 보고

2021. 7.

- 중랑물재생센터 총인처리시설 설치사업 - 전기안전관리 상주(대행) 용역 설계변경 보고

「중랑물재생센터 총인처리시설 전기안전관리 상주(대행)용역」관련 전기시설물 인계(’21.6.25.)에 따라 우리본부와 용역업체 간 계약을 종료하고자 아래와 같이 설계변경(감액)하고자 함

Ⅰ

용역개요

건    명 : 전기안전관리 상주(대행)용역(중랑물재생센터 총인처리시설)

용역대상 : **********

용역기간 : 2021. 4. 15. ~ 7. 15. (3개월)

계약업체 : ********************

계약금액 : ***********************

Ⅱ

변경계획

관련근거 : 설계변경 요청의 건[2021-07-2(2021.7.6.)호]

변경사유 : 시설물 인계‧인수에 따른 운영기관(중랑센터) 자체 관리

용역금액 변경

구분	변경 전	변경 후	증․감액
용역비	**********	**********	***********

※ 수처리 운영 시설물에 대한 인계‧인수 완료로 실 투입용역 기간(인력) 변경(7.15 → 6.25.)

조치계획 : 동 용역 건에 대하여 총무부에 설계변경 계약의뢰하고자 함

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.   끝.