문서번호	주거정비과-10596
결재일자	2021. 7. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주거정비행정팀장	주거정비과장
류상언	김중태	07/08 진경식

정비사업 e-종합정보관리시스템 구축 용역
월간업무보고(2021.6월)

2021. 7.

주거정비과

	월간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호	PRJ_03
	버전	V1.1	사업명	정비사업 e-종합정보관리시스템 구축	작성부서	(주)유시스

▪ 사 업 명	: 정비사업 e-종합정보관리시스템 구축
▪ 사 업 부 서	: 서울특별시 주택건축본부 주거정비과
▪ 추 진 기 간	: 2021.06.01.-2021.60.30 (14개월차)

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				계획	실적
1	사업관리	2020.05.14~2021.08.13	종료	95%	93%	연장
2
3
4
5
6

주간(월간)업무현황보고서

월간 업무 현황 보고서

서울특별시                                                               PP515-/5                                                                     사업수행사

진행단계

구현

전체 진척율

93%

단위과제

금월계획 및 실적(2021.06.01.- 2021.06.30.)

차월계획(2021.07.01.- 2021.07.30)

계 획

진척율

실 적

진척율

내 용

진척율

기획

▪ 분석/설계/구현/테스트 단계 산출물 작성 (필요시 보완)

▪ 종료 단계 산출물 작성

▪ 추가 요구사항 협의 및 관리

- 기능개선관리대장을 기반으로 기능개선 관리

▪ 시범운영 및 사용자교육 진행

▪ 기타 업무 협의

▪ 일정관리 및 통제

▪ 프로젝트 진행 보고

▪ 시스템 구축/개발 진행 확인

▪ 추정분담금 검증

▪ 중간보고 점검회의 4차, 본부장님 보고

94%

▪ 주간업무보고서 제출 (6/4, 6/11, 6/18, 6/25)

▪ 월간업무보고서 제출 (6/30)

▪ 종료 단계 산출물 작성 (4/5~)

- 사업기간 연장 협의로 제출일정 변경

▪ 중간보고 점검회의 4차 준비 및 진행

- 발표자료 및 발표원고 보완 / 시연 준비

- 6월 3일 10시 보고 진행

▪ 중간보고 점검회의 5차 준비 및 진행

- 발표자료 및 발표원고 보완 / 시연 준비

- 6월 17일 10시 보고 진행

▪ 본부장님 보고 준비

- 본부장님 PT 자료 초안 작성 및 발송 (~6/25)

- 6월 29일 신민규차장 미팅

- 7월 8일 10시 보고회 예정

▪ 조합 사용자 교육 진행 (누적 23개구)

- 강북구 (6/1), 양천구,금천구(6/3), 영등포구(6/4), 중랑구,강서구(6/7), 광진구,동대문구,동작구(6/8), 관악구(6/9), 강남구,강동구(6/10),

송파구(6/11). 구로구,서초구(6/17), 은평구 (6/23),도봉구(6/28)

종로구(교육거부),성동구(교육거부)

▪ 조합 자문단 운영

- 시범운영 자문회의 1차 (6/23)

- 시범운영 안내 자료 보완 (6/23~)

- 시범운영 자문회의 2차 (6/28)

▪ 추정분담금 계산식 검증 관련

- 공문 수신 및 확인 (6/3)

- 검증 자료 제출 (6/10)

- 추정분담금 회의 (6/17)

- 추정분담금 자문회의 (6/29)

▪ 지역주택, 리모델링주택

- 서울시 요청사항 정리 및 협의 완료

- 개발팀 진행 중

▪ 도시계획포털 연계 관련

- 열린데이터광장 자료 비교 및 확인

▪ 기능개선업무 협의 및 진행경과 보고

- 서울시 요청사항 정리 및 협의 완료

- 개발팀 진행 중

▪ 공공지원제도 콘텐츠 변경 확인

▪ 기타 서울시 내부 점검결과 대응

▪ 사용자의견 게시판 운영 / 3건 처리

▪ 주간업무회의 (6/3, 6/11, 6/17. 6/29)

▪ 직원 상주 지원 (구범석, ~8/31)

93%

▪ 분석/설계/구현/테스트 단계 산출물 작성 (필요시 보완)

▪ 종료 단계 산출물 작성

▪ 추가 요구사항 협의 및 관리

- 기능개선관리대장을 기반으로 기능개선 관리

▪ 시범운영 및 사용자교육 진행

▪ 시스템 전환 준비

▪ 종료단계 감리 시정 조치결과 보고

▪ 기타 업무 협의

▪ 일정관리 및 통제

▪ 프로젝트 진행 보고

▪ 시스템 구축/개발 진행 확인

▪ 추정분담금 검증

▪ 본부장님 보고

99%

개발

▪ 요구사항 분석 (필요시 추가 진행)

▪ 추가 요구사항 적용

- 기능개선관리대장을 기반으로 기능개선

▪ 서울시 검토결과 반영

▪ 추정분담금 산출 결과 검증 지원

▪ 시범운영 사이트 관리

94%

▪ 추가 요구사항 개발

▪ 개선사항관리대장에 따른 오류 수정
- 주간업무보고에 관리대장 첨부
▪ 추정프로그램 산출결과 검증

- 사업장 시뮬레이션 진행

▪ 추정프로그램 산출결과 검증회의 (6/18)

- 현장 현실에 맞게 계산식 수정 협의

- 건축공사비, 법인세, 건축설계비 협의사항 반영하여 재산출

▪ 추정분담금 검증 자문회의 참석 (6/29)

- 건축공사비, 법인세, 건축설계비 등 협의

- 협의사항 반영하여 추가 자문자료 준비 (6/30~)

▪ 지주택, 리모델링 정보공개 개발 (6/21~)

▪ 시스템 속도 개선 추가 작업 (6/1~)

- 수입 예산총괄표

- 전년도 예산결산 현황

- 연도별 예산 총괄표

- 월별자금 입출금 세부내역

- 자금수지계산서

- 자금수지보고서 등

▪ 구범석 과장 서울시 상주 (~8/31)

90%

▪ 요구사항 분석 (필요시 추가 진행)

▪ 종료 단계 산출물 작성

▪ 추가 요구사항 적용

- 기능개선관리대장을 기반으로 기능개선

▪ 서울시 검토결과 반영

▪ 추정분담금 산출 결과 검증 지원

▪ 시범운영 사이트 관리

▪ 시스템 전환 준비

▪ 종료단계 감리 시정조치결과 자료 준비

99%

디자인

▪ 종합포털, 정보공개 UI 개선 작업

▪ 서울시 검토결과 반영

▪ 디자인 개발 및 퍼블리싱

- 종합포털, 정보공개 UI 개선 및 콘텐츠 작업

▪ 중간보고 점검회의 4차, 본부장님 보고 자료 디자인

96%

▪ 서울시 내부 점검결과 수신 및 대응

- 퀵메뉴 구성 수정

- 게시판 수정, 오류페이지 디자인

- 자료실 상세페이지 등 정렬기준 수정

- 사용자등록에 안내문구 추가

- 로고 변경 등

▪ 중간보고 대비 점검회의)4차) 자료 디자인 지원

▪ 중간보고 대비 점검회의)5차) 자료 디자인 지원

▪ 본부장님 보고 자료 디자인 (진행중)

95%

▪ 종합포털, 정보공개 UI 개선 작업

▪ 종료 단계 산출물 작성

▪ 서울시 검토결과 반영

▪ 디자인 개발 및 퍼블리싱

- 종합포털, 정보공개 UI 개선 및 콘텐츠 작업

▪ 본부장님 보고 자료 디자인

▪ 시스템 전환 준비

▪ 종료단계 감리 시정조치결과 자료 준비

99%

미결업무 및 대책

내    용

대책 및 조치사항

▪ 추가 요구사항 반영 필요

- 조합업무지원 사이트 추가 요구사항을 협의하여 반영

- 리모델링 조합을 추가로 포함한 정비사업 프로세스 확대·개선 추가 요구사항을 협의하여 반영

- 정비사업 정보공개서 게시 추가 요구사항 반영

▪ 사업기간 연장 용역변경계약 체결

▪ 추가 요구사항 협의 완료
- 기능개선관리대장.xlsx 관리실시

▪ 매주 주간업무보고에 포함하여 보고

협의사항

※ 사업기간 연장 계약 및 추가 요청사항 반영을 위해 진척율 등을 반영하여 기재

▪ 4/30 회의록

요청사항	처리결과
운영서버에서 성능테스트 진행 바람	5/26 동접자수 테스트 진행

▪ 5/21 회의록

요청사항	처리결과
기타 요청사항에 대한 조치 바람	진행중

* 6/03 회의록

요청사항	처리결과
중간보고 점검회의 6월 17일 예정 / 자문의견 수렴하여 수정	진행중
시범운영 사이트 데이터 이관 및 기능개선 바람.	진행중

* 6/17 회의록

요청사항	처리결과
발표자료 보완하여 중간보고 준비(7월 5일 이후)	진행중

▪ 월간 진행일정 요약

- 2021년 6월 3일 : 중간보고 대비 4차 점검회의

- 2021년 6월 17일 : 중간보고 대비 5차 점검회의

- 본부장님 보고 준비

- 자치구별 사용자 교육 진행 (누적 23개구)

- 시범운영 사용자의견 게시판 운영 / 3건 처리

- 조합 자문단 운영 / 자문회의 2회 실시 (6/23, 6.28)

- 추정분담금 산출결과 검증 / 자문회의 (6/29)

- 추가 요구사항 협의 및 개발 / 시스템 성능 개선

▪ 향후 일정 요약

- 2021년 7월 8일 : 본부장님 보고 예정

산출물

/ 별첨사항

일련번호

내          용

PRJ_01_주간업무현황보고서_20210604_v1.0

PRJ_01_주간업무현황보고서_20210611_v1.0

PRJ_01_주간업무현황보고서_20210618_v1.0

PRJ_01_주간업무현황보고서_20210625_v1.0