문서번호	물재생계획과-9392
결재일자	2021. 7. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	하수정비팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
김재윤	이두환	이임섭		07/08 최진석
협 조

「탄천배수구역 우수토실 개선사업」

용역 준공기한 연기 검토보고

2021. 7.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「탄천배수구역 우수토실 개선사업」

용역 준공기한 연기 검토 보고

탄천배수구역 내 수질개선을 위해 추진중인 우수토실 모니터링용역 관련 계약상대자로부터 준공기한 연기 신청이 접수되어 검토 보고함

1		용역개요

○ 용 역 명 : 탄천배수구역 우수토실 개선사업 수리환경 모니터링 용역

○ 위    치 : 탄천, 양재천 우수토실 각 1개소

코엑스 앞(간이)

양재시민의 숲역 앞

(통합+간이)

탄  천

양재천

○ 과업내용 : 통합수질계측 및 유량계 설치(2개소)

- 우수토실 유량․수질 계측 및 분석

- 오염도 제어 필요여부 판단 및 설치방안 제시

- 오염도 제어 불필요시 계측 데이터 활용방안 제시 등

○ 기    간 : ‘20. 7. 28 ~ ’21. 7. 22

○ 도 급 비 : 1,474백만원

○ 도 급 사 : ㈜선진엔지니어링 종합건축사 사무소 외 4개사

2		그간의 추진경위

○ ’20. 07. 28      : 용역 착수

○ ’20. 11. 30      : 계측기 설치 위치 및 방식 중간보고

○ ’21. 03. ~ 06. : 탄천 우수토실 간이계측기 설치

- 계측항목 : TOC, TSS, NO3-N, NH4-N, EC(채수방식 병행)

○ ’21. 04. ~      : 양재천 우수토실 계측기 설치 업무 협의

- 하천 및 공원 점용 관련 업무협의(서초구), 전기설비 관련 협의(한전) 등

- 계측항목 : TOC, TSS, TP, TN, COD, EC 등 채수방식 병행

(방법 : 통합 및 간이 계측)

3		보고내용

○ 준공기한 연기 요청

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	‘20.7.28.~’21.07.22.	‘20.7.28.~’21.12.22.	5개월 연장

○ 준공기한 연기사유

- 계측장비 설치 여건이 코로나-19 이후 자재수급이 어려워져 계측기 제작에 장시간이 소요되었으며,

- 모니터링시스템 설치(계측기, 전기설비 등) 와 관련, 관련기관 협의기간 증가로 절대공기 부족

4		검토결과

○ 검토의견

- 계측장비 및 부속자재에 대한 수급 여건이 어려워짐으로 인해 계측기 제작에 장시간 소요 되었으며,

- 계측기 설치 관련 하천 및 공원 부지 점용, 전기설비 추가 설치 등 관련기관 협의 지연과 추가 작업물량 발생을 감안하여 과업기간 연기 필요

○ 귀책사유 : 발주청(서울특별시)

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 용 역 비 : 변경없음(추후 과업내용 변경으로 해당사항 발생시 조정)

5		향후계획

○ ‘21. 07.         : 통합계측기 설치(양재천)

○ ‘21. 08.~12.   : 계측기 모니터링 및 데이터 분석

○ ‘21. 12.         : 용역 준공

붙  임  : 1. 준공기한 연기요청서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.