투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(1회) 시행-[2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)]

우리사업소에서 시행중인『2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 시행코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가) -북부

나. 공사기간 : 2021. 03. 23 ~ 2021. 12. 31

다. 계약금액 : 금1,915,549,500원

라. 도 급 자 : (합)낙안이엔씨  대표 김복희

마. 설계변경(1회) 내역

(단위:원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비	5,039,049,500	5,039,049,500	-
도 급 비	1,915,549,500	2,480,049,500	증) 564,500,000
관 급 비	2,276,000,000	1,711,500,000	감) 564,500,000
이 전 비	847,500,000	847,500,000	-

바. 설계변경사유 : 굴착복구공사 의뢰 물량 증가에 따른 설계변경

사. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경(1회) 검토 보고서 1부.

2. 설계변경(1회) 요청서 1부.

3. 설계변경(1회) 내역서 1부.

4. 설계변경 사유서 1부.

5. 합의각서 1부.

6. 제비율 검증확인서 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	이상구		도로보수과장	이화신		북부도로사업소장	07/09 고영준
협조자	관리단속과장	이우승
시행	도로보수과-6311	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	944-5430	/전송	945-5072	/	n24090@seoul.go.kr	/	부분공개(5)