문서번호	도로보수과-6397
결재일자	2021. 7. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
박세근		이화신	07/12 고영준
협조

『2021년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』

설계변경(제2회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 7.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2021년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』 설계변경(제2회) 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 『2021년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』관련 공사 추진에 따른 설계변경(제2회) 검토보고 임.

		관련근거

❍『2021년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)-북부』설계변경(제2회)요청

[경동 제2021-1866호(2021.07.12.)]

		공사개요

❍ 공 사 명 : 2021년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)-북부

❍ 공사기간 : 2021. 1. 5. ~ 12. 31.

❍ 공사규모 : 소규모포장 79.83a, 절삭후덧씌우기 199.3a 등

❍ 공 사 비 : 1,962백만원

(도급비 1,174백만원, 관급비 563백만원, 이전비 225백만원)

❍ 시 공 사 : *********************

❍ 책임건설사업관리 : ************

		설계변경 내용

❍ 설계변경 사유

▶ 실정보고(제2회)에 따른 검토보고[도로보수과-6255호(2021.7.8.)]

- 긴급복구공사 작업지시서 및 현지 조사에 따른 수량조정 반영

- 공사물량 증·감에 따른 폐기물(폐아스콘) 수량 조정 등

❍ 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분	공 사 금 액			비고
	당 초	변 경	증·감
총공사비	1,962,041,250	2,122,600,000	증)160,558,750
도 급 비	1,174,200,000	1,421,300,000	증)247,100,000
관 급 비	562,841,250	465,300,000	감) 97,541,250
이 전 비	225,000,000	236,000,000	증) 11,000,000

❍ 주요공종 변경내역

공 종	규격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
소규모포장복구	야간	a	77.3	97.3	증)20
절삭후덧씌우기	야간	a	199.3	238.3	증)39
공동복구보수	야간	a	2.53	2.75	증)0.22
계		a	279.13	338.35	증)59.22

❍ 관급자재 변경내역

공 종	규격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
아스팔트 콘크리트	BB-2	톤	4,000	3,500	감)500
	WC-2	톤	800	800	-
	WC-4	톤	4,600	3,600	감)1,000
	WC-3	톤	400	1	감)399
	미끄럼방지	㎡	50	50	-

❍ 폐기물 변경내역

공 종	규격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
운반 및 처리	폐아스콘	톤	6,168	6,670	증)502

※『2021년 포장도로 폐아스콘 운반 및 처리용역』추후 수량 정산 및 설계변경 시행

		검토결과

❍ 책임건설사업관리기술자 검토의견

▶ 2021년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)-북부와 관련하여 설계변경 서류를 검토한 결과, 실정보고 승인내용과 공사비 반영이 적정하다고 판단됨.

❍ 공사담당 검토의견

▶ 상기 책임건설사업관리기술자 검토의견을 반영하여 시공물량 조정 및  설계변경 시행이 필요함.

		조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 긴급복구공사 시공물량 증·감에 대해 낙찰차액(160,558,750원) 및 예산 범위내에서 반영하여 설계변경(제2회)을 시행하고 변경계약 및 공사추진에 철저를 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경(제2회) 요청(책임건설사업관리) 1부.

2. 변경설계서(제2회) 1부.

3. 설계변경(제2회) 사유서 1부.

4. 실정보고(제2회)에 따른 검토보고 1부.

5. 제비율검증 확인서 1부.  끝.