문서번호	정수시설과-6567
결재일자	2021. 7. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
정덕교		07/12 이천영
협 조

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

배출수처리장 회수조 상등수 펌프 및 체크밸브 보수공사 설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

2021. 7.

[광암아리수정수센터]

정수시설과

배출수처리장 회수조 상등수 펌프 및 체크밸브 보수공사

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

우리 정수센터에서 시행중인『배출수처리장 회수조 상등수 펌프 및 체크밸브 보수공사』설계변경 자체 심의위원회 개최 결과를 보고합니다.

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 배출수처리장 회수조 상등수 펌프 및 체크밸브 보수공사

○ 계약기간 : 2021. 4. 22. ~ 2021. 7. 10.

○ 계약금액 : 금50,447,000원

○ 계약업체 : 신흥엔지니어링 주식회사 대표 김용찬

○ 공사내용

- 배출수처리장 회수조 상등수 펌프 4대 정비(1,3,4,5호기)

- 배출수처리장 회수조 상등수 체크밸브 및 신축관 4대 교체(2,3,4,5호기)

□ 심의위원회 개요

○ 일  시 : 2021. 7. 12.(월) 10:00

○ 장  소 : 정수시설과 사무실

○ 구  성

- 위원장 : 정수시설과장

- 위  원 : 공업6급 지동성, 공업6급 송재홍, 시설6급 신왕근, 공업6급 이민화

○ 심의내용

- 설계변경의 타당성

- 공종별 물량변경에 따른 설계변경의 적정성

- 제비율 산정 및 요율의 적정성

○ 변경공사비

구 분	당초 금액	변경 금액	증감금액	비고
총공사비	45,861,540원	50,447,000원	4,585,460원(증)

□ 심의결과 : 적정함

○ 시공물량 변동 및 신규공종 발생에 따른 설계변경 및 제비율 산정이 적정하게 반영되었음.

□ 조치의견

○ 위와 같이 시공물량 변동 및 신규공종 발생으로 인한 설계변경을 자체 심의위원회 심의 결과에 따라 설계변경 시행하고자 함.

붙임 1. 설계변경 개최의뢰서 1부.

2. 설계변경 검토의견서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 검증확인서 1부.  끝.