문서번호	정수시설과-6613
결재일자	2021. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
정덕교		이천영	07/13 김훤기
협 조
	주무관			지동성
	주무관			송재홍
	주무관			신왕근
	주무관			이민화

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

맥동침전지 송풍기 보수공사

설계변경계획 보고

2021. 7.

[광암아리수정수센터]

정수시설과

맥동침전지 송풍기 보수공사 설계변경계획 보고

우리 정수센터에서 시행 중인『맥동침전지 송풍기 보수공사』의 물량 증․감 및 제경비 정산에 따른 설계 변경을 시행하고자 함

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 맥동침전지 송풍기 보수공사

○ 공사기간 : 2021. 4. 28. ~ 2021. 7. 16.

○ 계약금액 : 금62,390,230원

○ 계약업체 : ㈜케이피테크 대표 김광희

○ 공사내용 : 맥동송풍기 임펠러, 베어링 및 모터베어링 교체

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 시공 물량 증가 및 제경비(보험료) 정산

○ 계약기간 : 변경 없음

○ 계약금액

구 분	당초 금액	변경 금액	증.감	비고
총 공 사 비	62,390,230원	61,050,230원	감)1,340,000원

○ 주요 변경내용

- 신규 공종 추가 및 보험료 정산

※ 세부사항 정비 변경 계획 보고서 붙임 참조

□ 조치의견

○ 상기 변경 사항에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최 후 심의 결과를 반영하여 변경 계약 후 준공처리하고자 함.

□ 향후계획

○ 설계변경 심의위원회 개최

- 개최일시 : 2021. 7. 13.(화) 14:00 ~

- 심의위원

· 위원장 : 정수시설과장

· 위  원 : 공업6급 지동성, 공업6급 송재홍, 시설6급 신왕근, 공업6급 이민화

- 주요 심의내용

· 설계변경 타당성

· 물량변경에 따른 설계변경의 적정성

○ 설계변경 및 변경계약

○ 준공검사 및 대금 지급

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.  끝.