투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(제2회) 시행[2021년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)]

우리사업소에서 시행중인『2021년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제2회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2021년 포장도로 긴급복구공사(연간단가) - 북부

2. 공사기간 : 2021. 01. 05. ~ 2021. 12. 31.

3. 도 급 비 : 금1,174,200,000원(금일십일억칠천사백이십만원)

4. 도 급 자 : *********************

5. 설계변경(제2회) 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총공사비	1,962,041,250	2,122,600,000	증)160,558,750
도 급 비	1,174,200,000	1,421,300,000	증)247,100,000
관 급 비	562,841,250	465,300,000	감) 97,541,250
이 전 비	225,000,000	236,000,000	증) 11,000,000

6. 설계변경사유 : 공종별 시공물량 증,감에 따른 설계변경

7. 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로시설물관리, 노후포장도로 정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비(금1,811,000,000원)

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로시설물관리, 도로함몰 예방사업, 일반운영비, 시설비(금73,600,000원)

- 도로관리과, 도로관리(6개 도로사업소), 사업소 환경개선, 도로사업소 사무환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비(금238,000,000원)

붙임  1. 설계변경(제2회) 검토 보고서 1부.

2. 설계변경(제2회) 요청(책임건설사업관리) 1부.

3. 변경설계서(제2회) 1부.

4. 설계변경(제2회)사유서 1부.

5. 제비율 검증확인서 1부.

6. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
★주무관	박세근		도로보수과장	이화신		북부도로사업소장	07/13 고영준
협조자	관리단속과장	이우승
시행	도로보수과-6418	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	02)944-5431	/전송	02)945-5072	/	psk8227@seoul.go.kr	/	부분공개(5)