코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	휘경유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역(장기2차) 일시중지 요청

1. 방재시설부-8083호(2021.06.22.)와 관련입니다.

2.『휘경유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역(장기2차)』관련 공사기간 장기화 및 과도한 사업비 소요 등에 따라 실시설계 타절을 위해 감사담당관실에 적극행정 추진을 위한 사전컨설팅을 의뢰하였으니 회신시까지 실시설계 용역을 일시중지하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 휘경유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역(장기2차)

나. 용역기간 : 2021.1.1.~12.10.(장기2차)

다. 계약금액 : 금379백만원(총차 1,189백만원)

라. 계 약 자 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소. ㈜이산, ㈜대한컨설탄트

마. 과업중지일자 : 2021.7.9.

바. 과업중지사유

- 공사기간 장기화 및 과도한 사업비 소요 등에 따른“휘경유수지 CSOs 저류조 실시설계”타절 가능 여부 감사담당관 요청

사. 과업중지기간 : 사전컨설팅 의뢰 결과 회신 시까지.

붙임  1. 사전컨설팅 의뢰(공문) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최용석		물순환시설팀장	이웅희		물순환정책과장	07/09 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-12675	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층 물순환정책과	/
전화	02-2133-3771	/전송	02-2133-1041	/	kr101092@seoul.go.kr	/	부분공개(5)