문서번호	교량안전과-10948
결재일자	2021. 7. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
김태형		민형일	07/12 한휘진
협조

『모래내고가 성능개선 등』

타당성 조사 용역 검토 보고

2021. 7.

안전총괄실

(교량안전과)

『모래내고가 성능개선 등』

타당성 조사 용역 검토 보고

모래내고가 노후화 및 손상으로 인하여 2004년부터 통행제한(20톤)중에

있으며, 본 교량과 교통축인 성산대교가 성능개선(DB-24)공사중에 있어

이에 대한 성능개선 또는 개축의 필요성이 있는 것으로 판단되어 타당성 조사

용역을 추진하고자 함.

□ 시설물 현황

시설명	종별	등급	준공일	위 치	규모(m)		노선명	비 고
					폭	연장
모래내고가	1종	B	1979.6	마포구 성산동 ~ 서대문구 연희동	16	615	성산로	통행제한 20톤

(위 치 도)                                  (전 경)

※ 고가차도 하부(P6 ~ P7 교각) : 철도횡단(경의선, 공항철도)

□ 추진배경

○  관련근거 : 모래내고가교 정밀안전진단용역(2018.05)

	주요내용
➤ ********************************************************************************************************************************************************

□ 현황 및 문제점

****************************************************************

**********************************************************************************************

*************************************************************

□ 검토의견

○ 모래내고가는 현재 통행제한(20톤)중에 있는 공용기간 42년이 경과된 노후된 교량으로, 본 교량과 교통축인 성산대교가 성능개선(DB-24)공사중에 있어 본 교량을 성능개선 또는 개축하는 방안을  검토할 필요성이 있으며,

○ 시설물의 안전성 확보를 위한 성능개선공사 시행을 결정하기 전 고가차도 철거 및 우회도로 설치에 대한 검토가 필요하여, 타당성 조사 용역을 발주 기술적 검토 및 교통영향 분석 등 철도횡단 고가 철거에 대한 종합분석을 수행하고자 함.

□ 용역수행 방안

(단위:백만원)

구 분	방 식	용역기간	소요예산	비 고
모래내고가	타당성 조사용역	‘22. 1. ~ ‘22.12.	200

○ 주요과업내용

- 모래내고가 철거 및 성능개선 여부 검토

- 교통영향 분석 검토

- 기본 및 실시설계를 위한 사전 검토

- 경제성 분석 및  투자심사에 필요한 자료 작성 및 기타사항 검토 등

□ 향후계획

○ ‘21. 7  : 22년도 예산편성시 실링내 반영

○ ‘22. 1 ~ ‘22. 12 : 타당성조사 용역 시행

붙임 : 모래내고가 실정보고(모래내고가 등 4개소 정밀안전점검 용역) 1부. 끝.