투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(총차8회,3차3회) 시행 및 변경계약 의뢰(반포천 유역 분리터널 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역)

1. 우리부에서 시행 중인「반포천 유역 분리터널 건설공사 건설사업관리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차 8회, 3차 3회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 반포천 유역 분리터널 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역

나. 계약금액 : ************************************

다. 용역기간 : 2018.1.25. ~ 2022.8.31.(3차 2020.4.1. ~ 2021.7.31.)

라. 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링외 2개사

마. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증·감
계약금액	총차	**************	**************	****
	3차	**************	**************	**************
계약 기간	총차	********************	********************	****
	3차	*******************	*******************	****

- 변경사유 : 용역 3차분 준공예정에 따른 실투입 반영/정산

바. 예산과목 : 도시개발특별회계, 치수 및 하천관리, 수방대책 사업, 강남역 일대 침수방지, 감리비(401-02)

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차·3차) 각1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	김재건		치수시설과장	손창익		방재시설부장	07/13 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-9257	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8775	/전송		/		/	부분공개(5)