“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	행정관리팀장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(맥동침전지 송풍기 보수공사)

1. 정수시설과-6613(2021.7.13.)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터에서 시행 중인 『맥동침전지 송풍기 보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 변경계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 맥동침전지 송풍기 보수공사

나. 계 약 자 : ㈜케이피테크 대표 김광희

다. 계약기간 : 2021. 04. 28. ~ 2021. 07. 16.

라. 변경사항 : 신규공종 발생 및 보험료 정산

마. 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비고
총 공 사 비	62,390,230원	61,050,230원	1,340,000원(감)

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비(맥동송풍기 선제적 정비)

감추산 : 2021.7.13.(8191)

붙임 1. 설계변경 보고서 및 심의위원회 개최의견서 각 1부.

2. 설계변경 내역서 및 검증확인서 각 1부.

3. 설계변경 합의서 1부.  끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	정덕교		주무관	정유성		정수시설과장	이천영		광암아리수정수센터소장	07/13 김훤기
협조자
시행	정수시설과-6631	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293 광암아리수정수센터 정수시설과	/
전화	02-3146-5374	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(5)