문서번호	설비부-9923
결재일자	2021. 7. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박근형		오삼록	07/14 김호성
협조

『시립청소년 음악창작센터 건립 정보통신공사』

설계변경(1차) 검토 보고

2021. 7.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 정보통신공사』

설계변경(1차) 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립 정보통신공사』관련 건설사업관리기술단으로부터 제출된 설계변경 사항에 대하여 검토 보고 드림

Ⅰ		사업개요

○ ******************************

○ ***********************************

○ ******************************************

○ **********************************************************

○ *****************************************

○ ***************

○ ***********************************

Ⅱ		관련근거

○ 정보통신공사 1차 설계변경 승인요청 [시립CM제2021-226호 ('21.07.14.)]

Ⅲ		검토내용

○ 계약현황

계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약건명	차수	계약기간	계약금액(원)
**************	*******	******	**	***********************	***********
			**	***********************	**********

○ 변경사유 : 공정현황을 고려하여 시공 가능 여부에 따라 1차분과 총차분 물량을 조정하여 내역 변경하기 위함

○ 변경내용

- 1차공사 준공기한 내에 시공가능 부분은 1차 내역분에 반영하고, 시공불가 부분을 장래 시공분으로 조정

○ 변경금액

구분	당초	변경	증감	비고
**	************	************	*	**** ******
**	***********	***********	*

○ 계약기간 : 변경없음

○ 건설사업관리인 검토의견

- 공정현황을 고려하여 시공가능 여부에 따라 1차분과 총차 내역물량을 조정하여 전체 공사비 증감없이 내역만 조정하는 것이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리기술인의 설계변경 검토의견이 적정하다고 판단되어 정보통신공사 건에 대하여 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.